11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 담양군에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
추성지구마을 하수도정비사업	7,610	4,410	2,800	400	2014	2010	93
담양산업단지 조성사업	93,381	-	2,962	90,419	2016	2013	10
무정지구하수관거 정비사업(2단계)	18,000	-	1,505	16,495	2016	2012	8
수북지구하수관거 정비사업(2단계)	16,000	-	1,459	14,541	2016	2012	9
첨단문화복합단지조성	145,000	728	1,385	142,887	2018	2013	5
대나무생태공원조성	131,667	18,703	500	112,464	2020	2013	10
광역친환경농업단지 조성사업	10,000	-	-	10,000	2015	2013	5
담양읍 소도읍 육성사업	92,500	19,571	488	702,441	2016	2007	85
녹색관광 메타길조성사업	3,800	22	838	2,940	2014	2011	10
창평면 도시계획도로 개설사업	9,500	6,500	500	2,500	2014	2010	100
만성리 도시계획도로 개설사업	2.067	1,861	206	-	2013	2010	100
한재골 생태문화공원 조성사업	4,700	-	333	4367	2015	2013	30
메타세쿼이아지구 농어촌테마공원조성사업	9,672	980	3,000	5,692	2015	2011	30
담양군 국민체육센터 건립사업	8,000	-	1,200	6,800	2015	2013	10
영산강 문화공원 조성사업	4,800	1,980	1,300	1,520	2014	2010	90
기후변화체험 교육관 건립	400	872	4,528	-	2014	2011	100
개구리생태공원조성	10,000	8	-	9,992	2016	2012	1
대전천 수변공원 조성사업	8,000	500	500	70,000	2015	2012	20

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

‣ 총사업비는 투융자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘13년말 기준으로 작성

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

추성지구마을하수도정비사업

담당자

상하수도사업소 김용희

(☎380-3337)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지 및 주민

생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 유입 수질개선으로 처리

비용 절감등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기  간 : 2009.1 ∼ 2014.12

○ 위  치 : 담양군 용면 추성리, 두장리, 통천리, 장찬리

○ 사업규모 : 하수처리장 220톤/일 하수관거 1식, 배수설비 400가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,610	4,578	1,102	1,930	-
국 비	5,327	3,204	889	1,234	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,283	1,374	213	696	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  93%)

○ 추성지구마을하수도정비사업 1단계 준공 : 2013. 4

○ 추성지구마을하수도정비사업 2단계 착공 : 2013. 6

□ 향후계획

○ 하수관거정비 공사추진

○ 하수관거정비사업 준공

사업명

담양산업단지조성사업

담당자

지역경제과 정선교

(☎380-3051)

□ 사업목적 및 필요성

○ (공장부지의 부족) 관내 입주를 희망하는 기업들이 지속적으로 늘어나는

가운데 제공할 부지가 부족한 상황임(광주인근)

○ (경쟁력 강화) 개별입지에 따른 난개발 방지와 미래성장동력 확보를 위한

산업기반 시설의 집중화가 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012. ~ 2016.

○ 위 치 : 담양읍 삼만리, 금성면 원천리 일원

○ 규 모 : 583,563㎡(176,837평)

○ 유치업종 : 자동차 부품, 바이오식품, 신재생에너지, 조립금속 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 93,381백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	93,381	-	2,962	20,741	69,678
국 비	30,819	-	-	-	30,819
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,862	-	1,871	20	2,971
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	56,700	-	1,091	20,721	34,888
기 타	1,000	-	-	-	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)

○ 산업단지 조성계획(안) 확정 : 2011. 8.

○ 산업단지 조사설계 및 제영향평가 용역 발주 : 2012. 3.

○ 산업단지 사업 시행자 선정 및 SPC 설립 : 2012. 8 ~ 2013. 10.

○ 재정투융자 심사 실시(중앙) : 2013. 1.

○ 통합심의 및 승인고시 (전라남도) : 2013. 11.

○ 산업단지 실시설계 기술심의 및 원가심사 : 2014. 1. ~ 2.

○ ‘15년도 국․도비 신청(폐수종말처리장, 공업용수) : 2014. 3.

사업명	담양산업단지조성사업	담당자	지역경제과 정선교 (☎380-3051)
○ 토지보상 감정평가 및 협의매수 통지 : 2014. 3 ○ 산업단지 공사도급계약체결(현대엠코 ↔ 담양그린개발) : 2014. 3. 21 ○ '15년도 국ㆍ도비 협의(폐수종말처리장, 공업용수) : 2014. 3.~ 9. ○ 진입도로 실시설계 추진(전라남도) : 2014. 6. ~ 2015. 5. ○ 산업단지 공사추진 : 2014.6.12 ~ 2016.6.11(24개월) □ 향후계획 ○ 토지보상 수용재결 추진 : 2014. 8. ~ 2014. 10. ○ 산업단지 관리기본(분양)계획 추진 : 2014. 8. ~ 2014. 10. ○ 폐수종말처리장 및 공업용수 실시설계 추진 : 2014. 9. ~ 2015. 5. ○ 폐수종말처리장 및 공업용수 공사추진 : 2015. 6. ~ 2016. 6. ○ 산업단지 기업 입주 : 2016. 7.

사업명

무정지구하수관거정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 최현구

(☎380-3335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지

및 주민생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 하수처리장

유입수질개선으로 처리비용 절감등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2013.1 ~ 2016.12

○ 위치 : 담양읍 삼만리외 , 금성면 대성리 외

○ 사업규모 : 하수관거 L=23.72km, 배수설비 602가구, 오수펌프장 6개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	18,000	-	475	3,555	13,970
국 비	12,600	-	124	1,852	10,624
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,400	-	351	1,703	3,346
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  15%)

○ 2단계 사업내역(단가, 수량) 작성

○ 영산강유역환경청 재원협의 완료

○ 전라남도 계약심사, 인가고시 완료

○ 하수관거정비 공사착공 및 추진(1차분)(2014.11. ~)

□ 향후계획

○ 하수관거정비 공사추진(1차,2차분)

○ 1차분 준공(2014.8)

○ 2차분 준공(2014.12)

사업명

수북지구하수관거정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 최현구

(☎380-3335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지 및 주민

생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 하수처리장 유입수질

개선으로 처리비용 절감등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2013.1 ~2016.12

○ 위치 : 수북면 대방리 외

○ 사업규모 : 하수관거 L=25.37km, 배수설비 770가구, 오수펌프장 10개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○  총사업비 : 16,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,000	-	795	2,798	12,407
국 비	11,200	-	188	1,866	9,146
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	-	607	932	3,261
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  19%)

○ 2단계 사업내역(단가, 수량) 작성

○ 영산강유역환경청 재원협의 완료

○ 전라남도 계약심사, 인가고시 완료

○ 하수관거정비 공사 착공 및 추진(1차분)(2014.11. ~)

□ 향후계획

○ 하수관거정비 공사추진(1차,2차분)

○ 1차분 준공(2014.8)

○ 2차분 준공(2014.12)

사업명

첨단문화복합단지 조성사업

담당자

투자유치단 최기태

(☎ 380-3132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태 전원조시 위상 제고 및 정주여건 개선을 통한 인구유입 촉진

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 ~ 2018년

○ 위    치 : 전남 담양군 담양읍 가산리, 수북면 두정․주평리 일원

○ 규    모 : 1,282,698㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	145,000	728	1,385	1,695	141,192
국 비	5,800	-	-	-	5,800
시 도 비	200	-	-	-	200
시군구비	4,000	728	1,385	1,695	192
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	135,000	-	-	-	135,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 첨단문화복합단지 개발계획 착수 : 2012. 5. 30.

○ 민간투자자 MOU체결(2회) : 2012. 9. 28., 2013. 3. 5.

∙기아자동차 전원주택조합, KBS 노조, (주) 유니온벨리시티 등

○ 주민공청회/군의회 의견청취 : 2013. 7. 19./2013. 8. 5.

○ (주)한양․담양군․전라남도 사업협약(MOU)체결 : 2013. 10. 24.

○ 지방재정투․융자(중앙) 심사 승인(조건부) : 2013. 10. 24.

○ 전라남도 도시개발구역지정 및 개발계획 승인 : 2014. 4. 28.

○ 실시설계 용역 발주 : 2014. 5. 20.

□ 향후계획

○ 특수목적법인 설립 : 2014. 10.

○ 편입토지 감정평가 및 보상 : 2014.  10. ~ 2015. 12.

○ 실시계획 인가 : 2014. 12. ~ 2015. 1.

○ 사업착공 및 완료 : 2015. 2. ~ 2018. 12.

사업명

첨단문화복합단지 조성사업

담당자

투자유치단 최기태

(☎ 380-3132)

□ 사업 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
사업규모	1,450,040㎡	1,282,698㎡	△168,342㎡
총사업비	200,000	145,000	△55,000
사업기간	2011~2015	2012~2018
사 업 량	전원주택 1,000세대 공동주택 620세대 상업시설 등	전원주택 890세대 상업시설 등
변경사유	o 사업규모 변경 ㆍ농림축산식품부 농지협의시 일부 축소로 사업구역계 축소 o 사업량 변경 ㆍ전라남도 도시계획위원회 심의시 공동주택(620세대) 제척

사업명

대나무 생태공원 조성사업

담당자

투자유치단 설  은

(☎ 380-3133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광 인프라 구축으로 체류형 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006년 ~ 2020년

○ 위    치 : 전남 담양군 금성면 금성리 476번지 일원

○ 규    모 : 671,186㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 131,667백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	131,667	18,703	500	550	111,914
국 비	10,293	6,500	300	150	3,343
시 도 비	-	718	-	-	-
시군구비	14,454	11,485	200	100	1,951
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	106,920	-	-	300	106,620
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 담양 군관리계획(지구단위계획) 결정 고시 : 2006. 6. 20.

○ 군계획시설(도로, 주차장) 실시계획인가 : 2008. 12. 4.

○ 기반시설(도로, 상하수도)공사 추진 : 2009. ~ 2013.

○ 민간사업자 투자협약(MOA) 체결(2개사) : 2011.9.21, 2012.4.4.

○ 지방재정 투ㆍ융자 심사(조건부 승인) : 2013. 10. 19.

○ 담양 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 고시 : 2013. 11. 28.

○ 담양 군관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 지형도면 고시 : 2014. 1. 27.

○ 담양 군관리계획(하수도사업) 실시계획 인가 : 2014. 6. 19.

□ 향후계획

○ 개발촉진지구(관광휴양사업) 지정 및 개발계획 승인 : 2014. 8. ~ 9.

○ 민간사업 시행자 지정 및 고시 : 2014. 10.

○ 실시설계 및 실시계획인가 : 2014. 10.. ~ 12.

○ 공유재산 감정평가 및 매각(군→민간사업자) : 2015. 1.

○ 단계별 사업착수 및 완료 : 2015. 1. ~ 2020. 12.

※ 개발촉진지구 지정 및 개발계획 승인 시기에 따라 향후 추진일정 변경될 수 있음

사업명

대나무 생태공원 조성사업

담당자

투자유치단 설  은

(☎ 380-3133)

□ 사업 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	149,400	131,667	△ 17,733
사업기간	2006~2015	2006~2020
사 업 량	콘도미니엄 306실 고급펜션 30동 힐링타운 71세대 도로 및 기반시설 등	콘도미니엄 306실 힐링타운 71세대 도로 및 기반시설 등	고급펜션 30동 감소
변경사유	o 사업량 축소에 따라 총사업비 감소 o 민자사업 단계별 사업추진으로 사업기간 연장

사업명

광역친환경농업단지 조성사업

담당자

친환경농산유통과 황성진

(☎380-2716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저비용․고효율의 대규모 친환경농업 방식을 통해 농업환경개선과 친환경농업

육성을 위하여 경종과 축산을 연계한 광역단위 자원순환형 친환경농업단지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년(3개년)

○ 위 치 : 담양읍, 봉산면, 고서면, 창평면, 대덕면 일원

○ 규 모 : 경축순환자원화센터 2식 외 4종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	-	-	6,000	4,000
국 비	3,000	-	-	1,800	1,200
시 도 비	1,200	-	-	720	480
시군구비	2,800	-	-	1,680	1,120
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,000	-	-	1,800	1,200
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 사업 추진을 위한 관련법 검토 : 2013. 3. 4

○『담양광역친환경농업회사법인 주식회사』사업자등록 : 2013. 9. 5

○ 선진지 견학 및 벤치마킹 실시(익산, 진천) : 2013. 10. 10

○ 사업대상지 주민 사업설명회 개최 : 2013. 12. 12

○ 사업주체 간담회 및 벤치마킹 : 2014. 1 ~ 3월

○ 도시계획 심의 및 과업지시서 작성 : 2014. 4 ~ 7월

□ 향후계획

○ 주민 공청회 실시(2014. 8월 중) : 경축순환자원화센터 사업 설명

○ 각종 인허가 절차 추진

- 관리계획변경 : 경축순환자원화센터

- 부지 재선정 : 친환경농자재 생산시설

○ 주요시설의 설계 및 업체선정 : 친환경산지유통시설, 친환경농업 체험장

사업명

담양읍 소도읍 육성사업

담당자

도시디자인과 김진한

(☎380-3100)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대나무 체험관 등 대나무를 주제로 한 테마 공간 조성

○ 생태숲 등 메타세쿼이아 가로수길과 연계한 테마 공간 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2007~2016년

○ 위치 : 담양읍 백동리․천변리, 학동리 일원

○ 사업규모 : 대나무 바이오단지(176,157㎡)

메타세쿼이아 전통놀이마당(326,393㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 92,500 백만원

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	92,500	19,571	162	2,767	70,000
국 비	5,034	5,000	-	-	-
시 도 비	1,050	922	128	-	-
시군구비	11,450	8,649	34	2,767	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	70,000	-	-	-	70,000
기타(특교세)	5,000	5,000	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85 %)

○ 2007년  3월  소도읍육성 사업계획 확정

○ 2007년  5월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2007년 12월  기본계획 및 실시설계

○ 2009년 12월  군 기본계획(변경) 승인

○ 2010년  8월  문화재 발굴조사 허가

○ 2010년  8월  농업진흥지역 해제 고시

○ 2011년  1월  실시계획인가 고시(전통놀이마당)

○ 2011년  3월  공사착공(전통놀이마당)

○ 2012년  6월  공사준공(전통놀이마당)

○ 2014년  1월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

○ 대나무바이오단지 조성계획 및 실시설계 완료 : 2014. 9

○ 대나무바이오단지 공사 완료 : 2015. 3

사업명

담양읍 소도읍 육성사업

담당자

도시디자인과 김진한

(☎380-3100)

□ 사업변경 내역

￭ 사업비 현황

(단위 :억원)

사업명	당초					현재
	계	국비	지방비	민자	기타	계	국비	지방비	민자
계	509	100	100	309	-	500	100	125	700
대나무바이오단지	161	57	57	47	-	116	45.5	70.5	-
메타세쿼이아 전통놀이마당	348	43	43	262	-	809	54.5	54.5	700

￭ 사업량 현황

(단위 :㎡)

사업명	최초면적	최종면적	증감	비고
계	641,520	502,550	△138,970
대나무 바이오단지	222,630	176,157	△46,473
메타세쿼이아 전통놀이마당	418,890	326,393	△92,497

사업명

녹색관광메타길조성사업

담당자

도시디자인과 김진한

(☎380-3100)

□ 사업목적 및 필요성

○ 메타세쿼이아 가로수길 주변의 체계적 개발과 관광자원화로 관광객 유치

및 다양한 여가선용 기회 제공

○ 4계절 관광과 친수가 형성되는 아름다운 가로수길 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2012년 ~ 2014년

○ 위치 : 담양읍 학동리 일원

○ 사업규모 : 광장, 실개천, 야간경관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원(국비 2,280, 시군구비 1,520)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,800	22	272	3,506	-
국 비	2,280	11	160	2,109	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,520	11	112	1,397	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2011년  6월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2011년  10월 녹색관광 메타길조성사업계획 확정

○ 2012년  4월  디자인계획수립용역 시행

○ 2012년 10월  디자인계획수립용역 준공

○ 2012년 10월  실시설계용역(1차분) 시행

○ 2013년  6월  실시설계용역(1차분) 준공

○ 2013년 12월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

○ 2013년  5월  수변공사 완료

□ 향후계획

○ 조성계획 및 실시설계 완료 : 2014. 9

○ 공사 완료 : 2015. 3

사업명

창평면 도시계획도로개설사업

담당자

도시디자인과 박제홍

(☎380-3118)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 화재등 재난대비와 보행 및 차량통행 개선 등

주거환경 개선등 시가지 이미지 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 2 ~ 2014. 5

○ 위 치 : 창평면 창평리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=850m  B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	9,500	6,500	500	500	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	9,000	6,500	-	500	2,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	500	-	500	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 1차구간 편입토지 보상협의(2008. 12 ~ 2011. 4)

○ 1차구간(L=538m) 도로개설완료(2011. 2 ~ 2014. 5)

□ 향후계획

○ 2차구간(l=312m) 예산부족분 확보(2,000백만원)

사업명

만성리 도시계획도로개설사업

담당자

도시디자인과 김장호

(☎380-3116)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 화재등 재난대비와 보행 및 차량통행 개선 등

주거환경 개선등 시가지 이미지 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1~2013. 12

○ 위 치 : 담양읍 만성리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=500m  B=13m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,067백만원(군비 2,067)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,067	1,861	206	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,067	1,861	206
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 준공)

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2011. 2~

○ 도로개설완료 : 2013. 12. 9

□ 향후계획

○ 사업완료로 해당사항 없음

사업명

한재골 생태문화공원조성사업

담당자

도시디자인과 김병진

(☎380-3117)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연경관이 훼손되지 않도록 지속가능한 공원조성을 통해 군민은 물론 내방객의      건전한 휴식 및 여가 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1~2015. 12

○ 위 치 : 대전면 평장리 일원

○ 규 모 : 공원조성 328,734㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,700	-	333	500	3,867
국 비	2,820	-	200	300	2,320
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,880	-	133	200	1,547
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2013. 7

- 22필지 64,062㎡ 중 13필지 49,288㎡ 보상완료

○ 한재골 편익시설 설치사업 추진 및 완료 : 2014. 7

□ 향후계획

○ 공원조성계획에 따른 사업추진 : 2014. 8~

사업명	메타세쿼이아아지구 농어촌 테마공원 조성사업	담당자	안전건설과 국정표 (☎380-3357)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 담양지역 특유의 독특한 자연·문화·향토자원을 토대로 메타세쿼이아 가로 수길 주변으로 농어촌 테마공원을 조성하여 휴식 및 휴양 지역의 도·농 교류를 활성화시켜 주민들의 실질적인 소득증대와 지역공동체의 혁신 역량 강화 및 주민화합을 도모함 □ 사업개요 ○ 위 치 : 담양군 담양읍 학동, 남산 번지 일원 ○ 사 업 량 : 50,859㎡ ○ 사 업 비 : 9,672백만원 (국비 4,836 군비 4,836) ○ 사업기간 : 2012～2015(4년) ○ 주요시설 : 진입도로, 주차장, 메타숲 광장·공연장, 메타숲 체험장·놀이터, 메타 동화숲, 카페테리아, 화장실 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 9,672백만원 (국비 4,836 군비 4,836) ○ 지금까지 집행액 : 3,368백만원(국비 1,684, 시군비 1,684) ○ 향후 소요액 : 6,304백만원(국비 3,152, 시군비 3,152) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 농어촌테마공원 농림부 심의 대상지 확정 : ‘11. 4. 28 ○ 전라남도 공공디자인 심의 : ‘13. 1. 25 ○ 학동마을 주민설명회 개최 : ‘13. 6. 19 ○ 전라남도 회계과 계약심사 : ‘13. 6. 21 ○ 테마공원 조성사업 착공 및 추진 : ‘13. 8 ～ ‘15. 8 ○ 실시계획 인가 및 고시 : ‘14. 1.16 □ 향후계획 ○ 주차장 및 공원조성, 건축물 신축 등 : ‘14. 7 ～ ‘15. 8

사업명

국민체육센터 건립사업

담당자

문화체육과 김흥태

(☎380-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 건강증진에 부응하고 생활체육을 중점 선도하는 인프라 구축

○ 주변 체육시설과 연계하여 전국단위 체육행사 유치로 지역이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2015. 12.(2년)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 만성리 461번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 9,199㎡,  건축연면적 2,200㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(기금 3,200  군비 4,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,000	-	1,200	5,500	1,300
국 비	3,200	-	-	3,200	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	-	1,200	2,300	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 종합스포츠타운 조성 기본계획(변경) 용역 실시 : 2012. 5.

○ 국민체육진흥기금 생활체육시설설치 지원사업 공모신청 : 2013. 1.

○ 생활체육시설 설치 지원사업 선정 통보 : 2013. 6.

○ 공유재산 관리계획(취득) 군정조정위원회심의 원안가결 : 2013. 6.

○ 국민체육센터건립부지 취득을 위한 공유재산 군의회 의결 : 2013. 7.

○ 지방재정 투융자심사 완료(전라남도) : 2013. 8.

○ 2013년도 중기지방재정계획 반영 : 2013. 9.

○ 편입토지 기공승락서 징구 완료 : 2013. 10. ~ 11.

○ 도 계약심사 및 일상감사 완료 : 2013. 3 ~ 2014. 4

○ 국민체육센터 건립사업 기본 및 실시설계용역 입찰 : 2014. 5 ~ 2014. 6.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2014. 7. ~ 2014. 10.(4개월간)

○ 담양 군관리계획변경 승인신청(군 도시계획위원회) : 2014. 7. ~ 2014. 8

○ 담양국민체육센터 건립 계약 및 착공 : 2014. 11. ~ 2014. 12.

○ 담양국민체육센터 건립 완공 : 2015. 12월한

사업명

영산강 문화공원 조성사업

담당자

문화체육과 김흥태

(☎380-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민, 관광객 편의 제공과 2015담양세계대나무박람회 홍보

○ 주변 관광지와 연계된 문화거점 공간으로 지역사회 커뮤니티 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1. ~ 2014. 12.(4년간)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 죽녹원로 130 일원

○ 규 모 : 20,224㎡(6,118평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원(국비 2,720  군비 2,080)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800	2,050	1,230	500	1,020
국 비	2,720	960	740	300	720
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,080	1,090	490	200	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  85%)

○ 영산강 문화공원 조성사업 추진 : 2011. 9. ~ 2012. 4.

• 바닥분수대 설치 및 조경녹지조성 : 7,280㎡

• 포 장 공 : 2,280㎡(바닥분수, 등의자 24개소, 산책로 등)

• 조경녹지 : 5,000㎡(목백합 222본, 맹종죽 420본, 수변공원 등)

○ 영산강 문화공원 관리사 신축공사 추진 : 2013. 2. ~ 11.

• 사업량 : 연면적 483.14㎡, 건축면적 396.20㎡(지하1층, 지상 1층)

○ 관리사 실내인테리어 및 전시홍보관 구축사업 추진

• 주요기능 : 2015담양세계대나무박람회 홍보관, 담양군 관광정보센터

○ 영산강 문화공원 경관조명 조성사업 추진

• 담양군 야간관광 테마조성사업 기본 용역 실시(도시디자인과) : 2014. 5. ~ 2014. 8.

□ 향후계획

○ 2015담양세계대나무박람회 홍보관 운영 : 2014. 5. ~ 2015. 8.

○ 영산강 문화공원 경관조명 조성사업 추진

• 실시 설계 용역 실시 : 2014. 9. ~ 10.

• 경관조명사업 공사 추진 : 2014. 11. ~ 12.

※ 담양군 야간관광 테마조성사업에 대한 기본용역이 담양군 전체로  실시

사업명

기후변화체험 교육관 건립

담당자

녹색환경과 송 국

(☎ 380-2950)

□ 필요성 및 기대효과

○ 기후변화 심각성 홍보 및 온실가스 감축활동 확산의 장 마련과

기후변화대응의 미래비전에 대한 체험 기회 부여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011.1 ~ 2014. 3.

○ 위    치 : 담양읍 학동리 56 - 5, 6, 7(메타길옆)

○ 시 공 사 : (주)금강건설, (주)시공테크

○ 사업규모 : 기후변화체험교육관 6,000㎡(전시관 1,563.33㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,400	872	4,528	-	-
국 비	2,700	436	2,264	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,700	436	2,264	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 타당성 및 기본계획 수립 : 2011. 4. 30.

○ 전남도 투융자심사 : 2011. 7. 22.

○ 공모제안서 심의 및 설계 : 2011. 12. 13. ~ 12. 20.

○ 설시설계 및 납품 : 2011. 12. 21. ~ ’12. 2. 20.

○ 건축분야 : 착공 및 준공 : 2012. 6. 22. ~ 2013. 11. 7.

○ 전시분야 : 착공 및 준공 : 2013. 2. 13.~ 2014. 3. 5.

○ 개   관  : 2014. 3. 6.

□ 향후계획

○ 기후변화체험교육관 운영 : 2014.  3. 6. ~

사업명

개구리생태공원 조성

담당자

녹색환경과 송  국

(☎ 380-2950)

□ 필요성 및 기대효과

○ 습지환경 생태연구 및 체험탐구 학습 클러스터 조성 및 생태공원

조성으로 생태도시 담양 이미지 극대화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012.1 ~ 2016.12

○ 위    치 : 담양읍 학동리 55-1, 2, 3 일원

○ 시 공 사 : 미정

○ 사업규모 : 부지면적 9,842㎡/건물 1,100㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	8	-	3322	5878
국 비	5,000	4	-	2261	2339
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	4	-	1061	3539
지 방 채	-	-	-	-	-

*2014년 792.4백만원(국비 396.2, 군비 396.2)불용 반납예정

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

○ 기본 및 타당성 조사 : 2011. 6. ~ 11.

○ 전남도 투융자 의뢰 및 심사 : 2012. 5. ~ 7.

□ 향후계획

○ 계획설계 용역	: 2014. 8. 4. ~ 9. 10

○ 실시설계 용역(계약심사, 일상감사 병행)	: 2014. 9. ~ 11. 10.

○ 인허가용역(공사 계약심사)	: 2014. 11.

○ 에너지절약계획서, 친환경인증, 장애인인증, 공공디자인심의 : 2014. 12.

○ 공사발주, 의뢰, 공고, 계약	: 2014. 12. 31.

사업명

대전천 수변공원 조성사업

담당자

녹색환경과 강아림

(☎380-3064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 상류에 유입되는 대전천의 수질 개선 및 도심 인근에 쾌적한

수변공간 조성

○ 사업장에서 배출되는 폐수 처리수 및 시가지에서 배출되는 하수를 인공

습지를 통해 재정화하여 영산강 상류의 수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2015(4년간)

○ 위 치 : 담양군 대전면 응용리 일원

○ 규 모 : 64,765㎡(수질정화습지, 산책로, 잔디마당 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,000	500	500	2,849	4,151
국 비	4,800	300	300	2,429	1,771
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,200	200	200	420	2,380
지 방 채	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립	: 2011. 1.

○ 개발제한구역 관리계획 변경	: 2011. 7. ~ 2012. 7.

○ 계약심사 및 일상감사 실시	: 2012. 7.

○ 지방재정 투융자 심사 실시	: 2012.11.

○ 기본 및 실시 설계 용역 착수	: 2013. 3.

(용역중지(중) 2014. 3.27 → 완료예정 2014. 8)

○ 기본 및 실시설계(안) 제출	: 2014. 3.26

(담양군 → 영산강유역환경청(한국환경공단))

□ 향후계획

○ 군 도시계획위원회 심의 및 결정고시 : 2014.  9.

○ 공사 발주(준공예정 2015. 12.)	: 2014.  9.