11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
광역친환경농업단지조성	10,000	1,000	5,000	4,000	2016	2013	35
담양군국민체육센터건립	8,000	2,200	3,507	2,293	2016	2013	10
영산강문화공원조성	6,330	5,080	500	750	2016	2010	80
담양일반산업단지조성	91,407	2,399	18,909	70,099	2018	2013	25
담양전통시장주차장조성	3,000	2,028	510	462	2016	2013	84
공예센터 및 복합문화거리 조성	3,000	-	50	2,950	2016	2013	10
개구리생태공원조성	10,000	8	329	9,663	2016	2012	40
대전천수변공원조성	8,500	149	2,543	5,957	2016	2012	35
담양호산성길조성	3,000	182	2,690	128	2015	2012	97
담양읍 소도읍 육성	95,313	19,728	488	75,097	2016	2007	85
녹색관광메타길조성	3,800	287	635	2,878	2016	2011	70
창평면도시계획도로개설	9,500	7,000	500	2,000	2014	2010	85
한재골생태문화공원조성	4,700	333	500	3,867	2016	2013	30
메타세쿼이아지구 농어촌테마공원조성	9,672	3,980	2,000	3692	2015	2011	85
금성산성권역단위 종합정비사업	3,923	1,626	917	1,380	2015	2011	85
월산권역단위종합 정비사업	5,730	1,959	520	3,251	2016	2011	45
첨단문화복합단지조성	200,000	1,500	1,500	197,000	2018	2013	10
대나무생태공원조성	131,667	19,203	550	111,914	2020	2013	25
대숲마을천년이야기쉼관 조성	1,817	0	54	1,763	2015	2012	80
추성지구마을하수도정비	7,674	7,274	400	-	2014	2010	100
무정지구하수관거 정비사업(2단계)	17,545	1,505	2,476	13,564	2017	2012	23
수북지구하수관거 정비사업(2단계)	15,454	1,459	2,430	11,565	2017	2012	25
담양세계대나무박람회	14,500	568	1,900	12,032	2015	2012	80

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

광역친환경농업단지 조성사업

담당자

친환경농산유통과 송태식(☎380-2717)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경종·축산 연계 자연순환형 농업을 통해 저비용·고효율의 친환경농업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2015

○ 위 치 : 대덕면 성곡리 산 123-1외 5개소

○ 규 모 : 5개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	10,000	1,000	2,748	1,852	4,400
국 비	3,000	300	1,209	171	1,320
도 비	1,200	120	484	68	528
군 비	2,800	280	322	966	1,232
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	3,000	300	733	647	1,320
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  35%)

○ 농축자원화시설(증축),친환경농자재생산시설,친환경산지유통시설,교육체험관        건축공사 추진 중

○ 농축자원화시설(신축) 주민반대에 따른 주민협의 및 용도지구 변경 추진 중

□ 향후계획

○ 농축순환자원화시설(증축),친환경농자재생산시설, 친환경산지유통시설,

친환경교육체험관 2015년 12월한 준공

○ 농축순환자원화시설(신축) 2015년 12월 한 용도지구 변경 및 2016년 사업추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

영산강 문화공원 조성사업

담당자

문화체육과

김흥태(☎380-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강의 시원지이며 저탄소 녹생성장 표본인 죽녹원과 관방제림, 메타세쿼이아 가로수길 인근에 숲과 역사, 문화가 어우러진 복합적 체험공간 및 주변 관광지의 부족한 휴식공간 조성으로 우리군 이미지 제고와 도시 경쟁력 강화를 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 1 ~ 2015. 12 (5년간)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 향교리 275번지 일원

○ 규 모 : 20,224㎡ (6,118평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6330 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,330	5,080	500	750	-
국 비	2,450	1700	300	450	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	3,880	3380	200	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 1단계 : 영산강 문화공원 조성사업 추진 : 2011. 9. 27 ~ 2012. 4. 28

∙ 바닥분수대 설치 및 조경녹지조성 : 7,280㎡

∙ 포 장 공 : 2,280㎡(바닥분수, 등의자 24개소, 산책로 등)

∙ 조경녹지 : 5,000㎡(목백합 222본, 맹종죽 420본, 수변공원 등)

○ 2단계 : 영산강 문화공원 관리사 신축공사 추진 : 2013. 2. 7 ~ 11. 14

∙ 사업량 : 연면적 483.14㎡, 건축면적 396.20㎡(지하1층, 지상 1층)

○ 3단계 : 관리사 실내인테리어 및 전시홍보관 구축사업 추진

∙ 주요기능 : 2015담양세계대나무박람회 홍보관, 담양군 관광정보센터

○ 4단계 : 영산강문화공원주변 야간경관 테마조성사업 추진

∙ 담양군 야간경관테마조성사업 기본용역  : 2015. 5. 30

∙ 담양군 야간경관테마조성사업 실시설계용역  : 2015. 7. 31

∙ 담양군 야간경관테마조성사업 계약 : 2015. 8. 04.

□ 향후계획

o 야간경관 테마조성사업 준공 : 2015. 8. 30.

o 야간경관 테마조성사업 시범운영 : 2015. 8 ~ 박람회 이전까지

사업명

담양국민체육센터 건립

담당자

문화체육과 김흥태(☎380-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 생활체육을 통한 건강 증진과 건전한 여가선용 기회를 제공하고, 삶의 질 향상을 위해 친환경적이고 에너지 절약형 국민체육센터의 선진 모델로 건립.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2016. 12. (3년)

○ 위 치 : 담양읍 만성리 461-1번지 일원

○ 규 모 : 부지면적9,860㎡, 건축면적 1,680㎡, 연면적2,104㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,000	2,200	3,507	2,293	-
국 비	3,200	200	3000	--	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,800	2000	507	2293
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	--	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 종합스포츠타운 조성 기본계획(변경) 용역 : 2012. 5. 25 ~ 8. 8

○ 체육시설 조성을 위한 담양군관리계획 변경요청 : 2012. 8. 14

⇒ 담양군관리계획 결정(안) 도 승인 신청(도시디자인과) : 2014. 2

○ 2013년 생활체육시설 설치지원사업 선정 : 2013. 6. 5

○ 국민체육센터 건립부지 취득을 위한 공유재산 의회 가결 : 2013. 7. 12

○ 지방재정 투․융자심사 완료(도) : 2013. 8. 5

○ 2013년 중기지방재정계획 반영 : 2013. 9. 30

○ 국민체육센터건립 부지 편입토지 매입완료 : 2015. 2. 28

○ 국민체육센터건립 기본 및 실시설계용역 완료 : 2015. 8. 07.

□ 향후계획

○  지방재정 투융자심사 (전라남도) : 2015. 8월

○  국민체육센터건립 공사 추진

∙ 입찰계약 및 착공(분야별 추진) : 2015. 9.

∙ 준공예정 : 2016. 12월

사업명

담양일반산업단지조성

담당자

지역경제과(정선교)

(☎380-3051)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업용지 안정적 공급으로 신산업 거점단지 조성을 통한 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양읍 삼만리 및 금성면 원천리 일원

○ 총사업비 : 약 901.7억원

(단위 : 억원)

합계	부지조성	공업용수	오폐수처리장	진입도로	비 고
914.07	586.6	58.8	54.67	214

○ 시 행 자 : 담양그린개발(담양군)

○ 사업규모 : 580,507㎡/331필지(175,603평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 91,407백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	91,407	2,399	18,909	40,133	29,966
국 비	31,107	-	-	11,200	19,907
도 비	2,000	-	-	2,000	-
군 비	1,640	-	40	214	1,386
지 방 채	-	-	--	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	56,660	2,399	18,869	26,719	8,673

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24.3%)

○ 산업단지 사업 시행자 선정 및 SPC 설립 : 2012. 8 ~ 2013. 10.

❍ 산업단지계획 통합심의 및 승인고시 (전라남도) : 2013. 11.

❍ 기공식 및 산단입주 MOU체결(5개사)  : 2014. 10. 23.

❍ 보상 : 98%(토지 99.63%, 분묘 95.67%)

❍ 분양공고 및 분양접수 : 2015. 5. 6. (총 95필지중 계약 및 입주 의향 16필지)

□ 향후계획

○ 사토 등 토목 추진 : 2015. 12.

○ 산단 진입도로 추진 : 2015. 9 ~ 2016. 12.

○ 폐수처리시설 추진 : 담양공공하수처리 시설과 연계처리 협의

○ 공업 용수 : 대형관정 개발 타당성 용역 중

사업명

담양전통시장 주차장 조성사업

담당자

지역경제과(서동선)

(☎380-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 담양시장 주차장 조성으로 이용객들의 쇼핑 편의성 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2016.12.

○ 위 치 : 담양군 담양읍 담주리 19-1번지 외 19필지(담양시장 일원)

○ 규 모 : 주차장 부지매입 20필지, 3,428㎡(미 매입 6필지, 621㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	2,028	510	462	-
국 비	1,200	1,200	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,800	828	510	462	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84.6%)

○ 담양시장 주차장 조성사업 협의매입 : 14필지, 2,807㎡

○ 건축물 철거 주차장 조성 : 건축물 6동, 2,206㎡

□ 향후계획

○ 건축물 철거 주차장 조성 : 건축물 5동, 601㎡(7필지)

○ 미 매입 6필지(621㎡) 협의매입 지속 추진

□ 사업변경 내역

○ “없음”

사업명

공예센터 및 복합문화거리 조성

담당자

지역경제과

박승철 (☎380-3044)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순 시설중심의 공예센터가 아닌 복합 문화의 거리 조성으로 연 700만 이상의 관광객을 대상으로 한 지역 주민의 소득창출 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 담양군 담양읍 향교리 1구 일원

○ 규 모 : 공예센터(2층 306.72㎡), 복합문화거리 조성(광장, 바닥정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	-	-	-	-
국 비	1,500	-	25	475	1,000
도 비	-	-	-	-	-
군 비	1,500	-	25	475	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 장기 발전계획 수립 : 2014. 12. ~ 2015. 4.

○ 공예 및 복합문화거리 조성 및 지원조례 제정 : 2015. 4.

○ 공예센터 및 복합문화거리 조성 실시설계 용역 : 2015. 4. ~ 6.

○ 공예 복합문화거리 육성사업 지원계획 공고 : 2015. 7. 6.

○ 공예센터, 복합문화거리 조성 사업 계약심사 : 2015. 7. ~ 8.

□ 향후계획

○ 공예 복합문화거리 육성사업 추진 : 2015. 7. ~ 12.

○ 공예센터 건립 및 복합문화거리 조성 공사 추진 : 2015. 11. ~

□ 사업변경 내역

○ “없음”

사업명

개구리 생태공원 조성

담당자

녹색환경과

송국(☎380-2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 법적 보호종 증식 등 생물 다양성 보전과 개구리를 통한 환경체험교육장으로서의 기능을 다할 수 있는 생태원이 되도록 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 1. ~2016. 12. 31

○ 위 치 : 담양읍 학동리 55-1일원(기후변화체험관 연접)

○ 규 모 : 1,346.39㎡(생태관 780.81㎡, 온실 565.58㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	10,000	7.6	328.8	4,193.2	5,470.4
국 비	5,000	3.8	164.4	2,096.6	2,735.2
군 비	5,000	3.8	164.4	2,096.6	2,735.2

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 도 지방재정 투․융자 심사	: 2012. 7. 26.

○ 건축 실시설계	: 2014. 10. 1.~11. 14.

○ 건축공사 착공	: 2015. 1. 6

□ 향후계획

○ 전시물제작설치 공모 입찰	: 2016. 2.

○ 건축 및 전시물제작설치 준공	: 2016. 12.

○ 점검 보완 및 개관	: 2017. 5.

사업명

담양호 산성길 조성사업

담당자

녹색환경과

강아림(☎380-3064)

□ 사업목적 및 필요성

○ 담양호의 수려한 경관과 어울리는 명품길 조성으로 적극적인 관광객

유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양군 용면 월계리, 용연리 일원

○ 규    모 : L=2.99㎞

○ 사 업 비 : 30억원(국비 18, 군비 12)

○ 사업내용 : 데크로드, 쉼터, 산책로 등 수변길 조성

○ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년 (3년간)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	182	2,690	128	-
국 비	1,800	109	1,691	-	-
군 비	1,200	73	999	128	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

○ 제 1 공구 - 군 추진

-  사업량 / 사업비 : L = 595m / 319백만원

-  사업기간 : 2014. 1. 24 ~ 2015. 8. 10.

-  시 공 사 : 광덕건설㈜

-  추진내용 : 쉼터 1, 데크 100m, 흙길 495m, 소목교 1개소 등

○ 제 2 공구 - 농어촌공사 위(수)탁 추진

-  사업량 / 사업비 : L = 2,433m / 2,325백만원

-  사업기간 : 2014. 2. 17 ~ 2015. 2. 4.

-  시 공 사 : ㈜진강건설

-  추진내용 : 화장실 1, 비가림시설 3, 데크 1,170m, 흙길 938m, 임도 325m,

소목교 2개소 등

□ 향후계획

○ 화장실 설치 및 용마루길 관리도로 개설 : 2015. 12.

사업명

담양읍 소도읍 육성사업

담당자

도시디자인과

김진한(☎380-3100)

□ 필요성 및 기대효과

○ 대나무 체험관 등 대나무를 주제로 한 테마 공간 조성

○ 생태숲 등 메타세쿼이아 가로수길과 연계한 테마 공간 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2007∼2016년

○ 위치 : 담양읍 백동리․천변리, 학동리 일원

○ 사업규모 : 대나무 바이오단지(176,157㎡)

메타세쿼이아 전통놀이마당(326,393㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 95,313 백만원 (국비 5,000 특교세 5,000 도비 1,050,

시군구비14,263, 민자 700,000)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	95,313	19,728	488	2,767	70,000
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	1,050	1,050	-	-	-
시군구비	14,263	8,678	488	5,097	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	70,000	-	-	-	70,000
기타(특교세)	5,000	5,000	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85 %)

○ 2007년  3월  소도읍육성 사업계획 확정

○ 2007년  5월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2007년 12월  기본계획 및 실시설계

○ 2009년 12월  군 기본계획(변경) 승인

○ 2010년  8월  문화재 발굴조사 허가

○ 2010년  8월  농업진흥지역 해제 고시

○ 2011년  1월  실시계획인가 고시(전통놀이마당)

○ 2011년  3월  공사착공(전통놀이마당)

○ 2012년  6월  공사준공(전통놀이마당)

○ 2014년  1월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월 ~ 2015년 6월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

○ 2015년  1월  조성계획 변경

○ 2015년  3월  실시계획 인가 사전열람공고

○ 2015년  4월~6월  실시계획 인가에 따른 환경영향평가 협의

○ 2015년  7월  실시계획 인가

□ 향후계획

○ 대나무바이오단지 문화재 시굴 및 정밀조사 용역 : 2015. 9~12

○ 대나무바이오단지 공사 완료 : 2016. 12

사업명

녹색관광메타길조성사업

담당자

도시디자인과

하창원(☎380-3103)

□ 필요성 및 기대효과

○ 메타세쿼이아 가로수길 주변의 체계적 개발과 관광자원화로 관광객 유치

및 다양한 여가선용 기회 제공

○ 4계절 관광과 친수가 형성되는 아름다운 가로수길 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2012년 ~ 2015년

○ 위치 : 담양읍 학동리 일원

○ 사업규모 : 광장, 실개천, 야간경관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원(국비 2,280, 시군구비 1,520)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,800	287	635	2,878
국 비	2,280	171	383	1,726
시 도 비
시군구비	1,520	116	252	1,152
지 방 채
민간자본
기타(특교세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2011년  6월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2011년  10월 녹색관광 메타길조성사업계획 확정

○ 2012년  4월  디자인계획수립용역 시행

○ 2012년 10월  디자인계획수립용역 준공

○ 2012년 10월  실시설계용역(1차분) 시행

○ 2013년  6월  실시설계용역(1차분) 준공

○ 2013년 12월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월 ~ 2015년 1월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

○ 2014년  5월  수변공사 완료

○ 2014년 4월~ 2015년 5월 야간경관사업 기본계획 수립용역

○ 2015년 1월~ 녹색관광메타길조성사업 시행(광장)

○ 2015년 6월~  메타길 야간경관사업추진

□ 향후계획

○ 녹색관광메타길조성사업 완료 : 2015. 12

○ 메타길 야간경관사업  완료 : 2015. 12

사업명

창평면 도시계획도로개설사업

담당자

도시디자인과

김장호(☎380-3116)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획도로 개설로 화재등 재난대비와 보행 및 차량통행 개선 등

주거환경개선 등 시가지 이미지 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011. 2~2016. 12

○ 위 치 :  창평면 창평리 일원

○ 규 모 :   도로개설 L=850m  B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,500	7,000	500	-	2,000
국 비	500	500	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	9,000	6,500	500	-	2,000
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 1차구간 편입토지 보상협의(2008. 12~2011. 4)

○  1차구간(L=538m) 도로개설완료(2011. 2~2014. 5)

□ 향후계획

○ 2차구간(l=312m) 예산부족분 확보(2,000백만원) :  2016. 1 ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

한재골 생태문화공원조성사업

담당자

도시디자인과

김병진(☎380-3117)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연경관이 훼손되지 않도록 지속가능한 공원조성을 통해 군민은 물론        내방객의 건전한 휴식 민 여가 문화공간제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011. 2~2016. 12

○ 위 치 :  대전면 평장리 일원

○ 규 모 :  공원조성 328,734㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,700 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,700	333	500	833	3,034
국 비	2,820	200	300	500	1,820
도 비	-	-	-	--	-
군 비	1,880	133	200	333	1,214
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2013. 7

- 25필지 78,321㎡ 중 22필지 75,108㎡ 보상완료

○ 한재골 편익시설 설치사업 추진 및 완료 : 2014. 7

○ 주차장조성공사(1차분) 추진 :  2015. 6 ~

□ 향후계획

○ 주차장조성공사(2차분) 실시설계용역추진 :  2016. 2 ~

○ 주차장조성공사(1차분) 준공 :  2016. 4 ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

메타세쿼이아지구 농어촌테마공원

조성사업

담당자

안전건설과

정형석(☎380-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○“물 맑고 볕이 따뜻한 고장”인 담양지역 특유의 독특한 자연․문화․      향토자원을 토대로 메타세쿼이아 가로수길 주변에 농어촌 테마공원      을 조성하여 휴식 및 휴양공간 제공하고,

○ 농촌주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식 및 전통문화 체험공간을   제공하여 도․농 교류 촉진을 통한 농촌지역 경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년(4년간)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 학동리 일원

○ 규 모 : 테마공원조성 A=50,809㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,672백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,672	3,980	2,000	3,692	-
국 비	4,836	1,990	1,000	1,846	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,836	1,990	1000	1,846	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 진입도로조성 완료 : 100%

○ 테마공원조성      : 80%

□ 향후계획

○ 메타세쿼이아지구 농어촌테마공원 조성 토목건축공사완료  : 2015. 9.

○ 메타세쿼이아지구 농어촌테마공원 조성사업 최종사업준공  : 2015. 12.

사업명

금성산성권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과

정성종(☎380-3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활권, 영농권, 수리권 등의 특징에 따라 주민간 동질성과 유대감을 가진 소규모의 권역을 묶어 특성에 맞는 경관개선, 생활환경정비, 주민역량강화 및 소득기반 확충 등을 통하여 지속가능한 생활터전의 유지 및 최소한의 기초생활수준 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년(4년간)

○ 위 치 : 담양군 금성면 금성리, 덕성리, 봉서리 일원

○ 규 모 : 생활기반확충 4개소, 소득증대 3개소, 경관개선 4개소, 역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,923백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,923	1,626	917	1,380	-
국 비	2,746	1,138	642	966	-
도 비	7	7	-	-	-
군 비	1,170	481	275	414	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 금성산성권역단위 종합정비사업(H/W) 시행 : 90%

○ 금성산성권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 시행 : 80%

□ 향후계획

○ 금성산성권역단위 종합정비사업(H/W) 준공 : 2015. 12.

○ 금성산성권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 준공 : 2015. 12.

사업명

월산 물구십리권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과

정성종(☎380-3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활권, 영농권, 수리권 등의 특징에 따라 주민간 동질성과 유대감을 가진 소규모의 권역을 묶어 특성에 맞는 경관개선, 생활환경정비, 주민역량강화 및 소득기반 확충 등을 통하여 지속가능한 생활터전의 유지 및 최소한의 기초생활수준 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년간)

○ 위 치 : 담양군 월산면 월산리, 월평리, 화방리 일원

○ 규 모 : 생활기반확충 4개소, 소득증대 1개소, 경관개선 4개소, 역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,730	1,958	520	3,252	-
국 비	4,011	1,371	364	2,276	-
도 비	86	10	-	76	-
군 비	1,633	577	156	900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  45%)

○ 월산 물구십리권역단위 종합정비사업(H/W) 시행 : 40%

○ 월산 물구십리권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 시행 : 50%

□ 향후계획

○ 월산 물구십리권역단위 종합정비사업(H/W) 준공 : 2016. 12.

○ 월산 물구십리권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 준공 : 2016. 12.

사업명

첨단문화복합단지 조성사업

담당자

투자유치단 조장훈(☎380-3132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합 전원주거단지 공급을 통한 관광 시너지효과 창출 및

문화자원 개발을 통한 지역경제활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2018

○ 위 치 : 담양읍 가산리, 수북면 두정리․주평리 일원

○ 규 모 : 1,272,955㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	200,000	1,500	1,500	41,000	156,000
국 비	5,800	-	-	-	5,800
도 비	200	-	-	-	200
군 비	4,000	1,500	1,500	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	190,000	-	-	40,000	150,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 도시개발구역 지정 및 개발계획 승인고시 : 2014. 4. 24

○ 우선협상대상자 선정(양우건설주식회사) : 2015. 7. 9

□ 향후계획

○ 실시계획 승인 및 고시 : 2015. 12

○ 공사추진 : 2016. 1 ~ 2018. 12

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대나무생태공원 조성사업

담당자

투자유치단

설  은(☎380-3137)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레포츠 휴양타운 및 예술인촌 조성으로 관광도시 담양이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2020.

○ 위 치 : 담양군 금성면 금성리 505번지 일원

○ 규 모 : 671,186㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 131,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	131,667	18,703	500	550	111,914
국 비	10,293	6,500	300	150	3,343
도 비	718	718	-	-	-
군 비	13,736	11,485	200	100	1,951
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	106,920		-	300	106,620
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 개발촉진지구(관광휴양사업) 조건부 지정 : 2014. 9. 4

○ 개발촉진지구(관광휴양사업) 지정 공고(국토부) : 2014. 12. 1.

○ 개발계획 확정․고시(도시디자인과) : 2014. 12. 11.

□ 향후계획

○ 민간사업자 지정 및 실시계획 인가 : 2015. 12.

○ 공사추진 : 2016. 1 ~ 2020. 12

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

대숲마을천년이야기쉼관조성

담당자

대나무자원연구소

옥승준 (☎380-2781)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대나무 뿌리(지하경) 세계의 관찰․체험시설과 함께 미니 대숲마을 인공폭포        등 휴식공간을 조성하여 천년 대숲마을의 이야기 컨텐츠화로 죽녹원내 부족한       쉼터 공간 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2015

○ 위 치 : 담양읍 향교리 죽녹원 내

○ 규 모 : 600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,817백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,817	-	54	1,763	-
국 비	950	-	27	923	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	867	-	27	840	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 대뿌리 지하경 전시시설 및 매표소 쉼터광장, 진입로 사업 추진

□ 향후계획

○ 지하경, 진입로, 매표소, 쉼터 광장 준공 추진 : 2015. 9

□ 사업변경 내역

○ 해당사항없음

사업명

추성지구 마을하수도 정비사업

담당자

상하수도사업소 김용희(☎380-3337)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지

및 주민생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 유입 수질개선

으로 처리비용 절감 등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009.1~2014.12

○ 위 치 : 담양군 용면 추성리, 두장리, 통천리, 장찬리

○ 규 모 : 하수처리장 220톤/일, 하수관거 1식, 배수설비 400가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,674백만원(국비 5,327, 시도비 - , 군비 2,347, 기타 - )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,674	7,274	400	-	-
국 비	5,327	5,327	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	2,347	1,947	400	-	-
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 추성지구 마을하수도 정비사업 1단계 준공 : 2013. 4

○ 추성지구 마을하수도 정비사업 2단계 준공 : 2014. 10

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

무정지구 하수관거 정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 김용희(☎380-3337)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지

및 주민생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 유입 수질개선

으로 처리비용 절감 등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.1~2017.12

○ 위 치 : 담양읍 삼만리외, 금성면 대성리 외

○ 규 모 : 하수관거 L=23.72㎞, 배수설비 602가구, 오수펌프장 6개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,545백만원(국비 12,281, 시도비 - , 군비 5,264, 기타 - )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	17,545	1,505	2,476	6,510	7,054
국 비	12,281	400	2,000	4,907	4,974
도 비	-	-	-	-	-
군 비	5,264	1,105	476	1,603	2,080
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ 영산강유역환경청 재원협의 완료

○ 전라남도 계약심사, 인가고시 완료

○ 하수관거정비 공사착공 및 추진(1차,2차,3차분)

□ 향후계획

○ 하수관거정비 공사추진(3차분)

○ 2차분준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

수북지구하수관거정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 김용희(☎380-3337)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거의 체계적인 정비로 지하수 및 영산강 상류지역 수질오염방지

및 주민생활 불편해소와 건전한 도시발전 도모

○ 생활하수 방류체계를 확립하여 쾌적한 주거환경개선 및 유입 수질개선

으로 처리비용 절감 등 운영효율제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.1~2017.12

○ 위 치 : 수북면 대방리 외

○ 규 모 : 하수관거 L=25.37㎞, 배수설비 770가구, 오수펌프장 10개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,454백만원(국비 10,818, 시도비 - , 군비 4,636, 기타 - )

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	15,454	1,459	2,430	5,251	6,314
국 비	10,818	350	2,000	4,026	4,442
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,636	1,109	430	1,225	1,872
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 영산강유역환경청 재원협의 완료

○ 전라남도 계약심사, 인가고시 완료

○ 하수관거정비 공사착공 및 추진(1차,2차,3차분)

□ 향후계획

○ 하수관거정비 공사추진(3차분)

○ 2차분준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2015담양세계대나무박람회

담당자

(재)담양세계대나무박람회조직위원회 추정희(380-2507)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 대표브랜드인 ｢담양 대나무｣의 산업․문화․관광․학술을 통합      하는 국제행사를 개최하여 대나무의 글로벌화 추진

○ 죽녹원 등 기존 시설물을 활용하고 행사의 외형적 규모보다는 내실있는

콘텐츠 구성을 통해 경제적인 박람회 개최

□ 사업개요

○  기    간 : 2015. 9. 17. ~ 10. 31(45일간)

○  장    소 : 죽녹원 일원

○  면    적 : 313,023㎡ (전시면적 17,743㎡)

○  주    제 : 대숲에서 찾은 녹색 미래

○  관람목표 : 90만명 (내국인 88, 외국인 2)

○  내    용 : 대나무문화․산업 국제교류전, 학술회의, 전시 등

○  주    최 : 담양군․전라남도․산림청 공동 개최

○  후    원 : 미래창조과학부, 문화체육관광부, 환경부

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 예 산 액 : 14,500백만원 (광특 7,250, 군비 7,250)     (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	14,500	568	1,900	12,032	-
국 비	7,250	284	950	6,016	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	7,250	284	950	6,016	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ｢2015담양세계대나무엑스포｣ 국제행사 승인 : 2012. 2. 28.

○ 실시설계 및 실행계획 수립 : 2014. 6. ~ 12.

○ 주차장 조성 : 4개소(대형 및 소형 10,000대)

○ 박람회장 조성 : TFS텐트 2동 설치, 상하수도ㆍ조경 공사 중

○ 입장권 사전판매 : 목표 54만매 (판매실적 54만8천매- 2015. 8.)

○ 국제 네트워크 구축 : 말레이시아, 프랑스, 벨기에, 일본, 미국, 대만 등

○ WBC 발표논문 선정 44건, 참가자 등록 28개국 101명

□ 향후계획

○ 전시관 조성, 전시연출 : 2015. 8월한

○ 박람회 주차장 및 기반시설 조성  : 2015. 8월한

○ 박람회 행사 최종리허설 : 1차 리허설- 2015. 9. 11 , 2차 리허설- 9. 14

○ 공식행사 국내외 주요인사 초청 : 국무총리, 장관 기관단체장 등

11-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

11-3. 민간투자사업

우리 군에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL	‘05 담양군 하수관거	담양 하수관거(주)	29,975	13,143	3,189	43,875	2009~ 2029
BTO		해	당	사 항	없 음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준), 2015년 이후는 추정액

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

'05 담양군 하수관거 BTL사업

담당자

상하수도사업소

심재경(☎380-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후 불량관거 개량 및 관거 신설로 하수관거 기능 강화 및

하수처리시설의 운영효율 개선 및 방류하천 수질개선

□ 사업개요

○ 기간 : ‘06. 6∼’09.11  ○ 위치 : 담양읍 일원  ○ 민간사업자 : 담양하수관거(주)

○ 총사업비 : 29,975백만원 ○ 사업규모 : 오수관거 26.7㎞, 우수관거 11,1㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(사업수익률 5.89%, 운영기간(20년) : 2009∼2029)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	60,207	9,921	3,222	3,189	43,875
국 비	34,546	6,010	1,940	1,912	24,684
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	25,661	3,911	1,282	1,277	19,191
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중)

○ 운영기간 : 2009.11.26∼2029.11.25(20년)

○ 운 영 사 : 담양하수관거(주)

□ 향후계획

○ 업무협약 절차에 따라 사업추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음