109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 담양군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
개구리생태공원조성	10,000	336	1,461	8,203	2017	2012	70
대전천생태하천복원	8,500	2,693	943	4,864	2017	2012	35
생태교통시스템구축	4,129	1,900	1,078	1,151	2017	2016	60
에코허브센터 조성사업	2,148	-	18	2,130	2018	2016	20
첨단문화복합단지 조성사업	158,142	3,662	42,309	112,171	2019	2013 2016	40
대나무생태공원 조성사업	145,940	20,466	680	124,800	2020	2013	5
메타세쿼이아지구 농어촌테마공원조성	9,672	9,147	360	165	2017	2011	100
월산권역단위 종합정비사업	5,730	4,051	714	965	2017	2011	75
무정지구하수관거 정비사업(2단계)	14,510	9,904	2,906	1,700	2017	2012	100
수북지구하수관거 정비사업(2단계)	15,454	9,108	4,046	2,300	2017	2012	100
도로와지하시설물전산화사업	1,753.2	340	334	1,079.2	2018	2015	50
담양군 국민체육센터건립	9,200	3,200	1,500	4,500	2018	2010	65
녹색관광메타길 조성	3,800	2900	900	-	2016	2011	100
담양읍 소도읍 육성사업	90,807	67,600	2	23,091	2020	2007	74
한재골생태문화공원조성	4,700	1,399	455	2,846	2018.10	2013	42
담양일반산업단지조성	93,707	61,441	18,200	14,066	2018	2013	80
공예센터 및 복합문화거리조성	3,000	270	1,009	1,721	2017	2013	85
문화회관 인근 공영주차장 조성	3,800	-	-	3,800	2017	2016	20

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

개구리생태공원조성

담당자

녹색환경과

송  국(☎380-2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 법적 보호종 증식 등 생물 다양성 보전과 개구리를 통한 환경체험교육장       으로서의 기능을 다할 수 있는 생태원이 되도록 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양군 담양읍 학동리 55-1번지 일원

○ 사 업 비 : 100억원(국비 50, 지방비 50)

○ 사업기간 : 2012. 01. ~ 2017. 12.

○ 사업내용 : 생태관 781㎡, 온실 566㎡, 야외서식생태학습장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,000	1,797	2,316	4,113
국 비	5,000	899	1,158	2,057
군 비	5,000	898	1,158	2,56

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 건축공사(전기, 통신, 소방, 조경) 착공 : 2015. 1.

○ 전시물 착공 및 건축공사 마무리 단계 : 2016. 9.

□ 향후계획

○ 내부 전시물 제작ㆍ설치 완공 : 2017. 11.

○ 개구리 생태공원 개관 : 2018. 4.

사업명

대전천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과

강아림(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활하수 및 공장폐수의 재처리를 통한 오염총량 관리제 삭감량 확보와

상습침수지인 대상지의 홍수방지 대책 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 1. ~2018. 12. 31.

○ 위 치 : 담양군 대전면 중옥리 일원

○ 규 모 : 29,350㎡(수질정화습지 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,500	3,636	51	1,523	3,291
국 비	5,100	2,181	31	186	2,702
군 비	3,400	1,454	20	1,337	589

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 완료      : 2011. 10.

○ 개발제한구역 관리계획 변경	: 2012.  7.

○ 전라남도 지방투․융자 심사	: 2012. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역	: 2013.  4.

○ 행정절차 이행을 위한 용역 추진        : 2017.  8. ~ 2017. 12.

-  도시계획 시설결정 등 용역(군계획시설 결정, 경관성․교통성 검토, 사전재해영향평가 등)

-  전략환경영향평가 및 소규모환경영향평가 용역

※ 사업계획(위치 등) 변경승인 완료 - 영산강청

□ 향후계획

○ 편입토지 공공용지 취득 보상	: 2017.  9.

○ 전략환경영향평가 협의(영산강청)	: 2017. 10.

○ 군 관리계획 결정 고시	: 2017. 11.

○ 실시계획 인가	: 2017. 12.

○ 공사발주	: 2018.  1.

□ 사업변경 내역 : 총사업비 변경

○ 내  용 : 당초 8,000백만원 → 변경 8,500백만원(500백만원 증)

○ 사  유 : 문화재 유존지역으로 발굴조사를 위한 비용 필요

사업명

생태교통시스템 구축

담당자

녹색환경과

강아림(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주요 관광지 주변의 교통체증에 의한 차량정체와 주차난 해소

○ 화석연료 사용에 따른 이산화탄소 발생량 저감으로 대기질 개선

○ 관광객들의 편의 도모 및 이색 볼거리 제공으로 관광활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2017년

○ 위 치 : 담양군 일원

○ 규 모 : 충전시설 1개소, 전기버스 4대, 전기자동차 3대 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,129백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,129	1,900	1,078	1,151
국 비	2,890	1,330	755	804
군 비	1,239	570	323	346

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 생태교통시스템 구축사업 위수탁 협약 체결(한국환경공단) : 2015. 12.

○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인 : 2016. 2.24.

○ 친환경 전기버스(3대) 및 충전시설 구매 : 2017. 5.

○ 생태교통시스템 모니터링 용역 발주 : 2017. 5.

○ 전기자동차 및 친환경전기버스(1대) 구매 발주 : 2017. 8.

□ 향후계획

○ 버스정류장 및 관리시스템 공사발주 : 2017. 11.

○ 사업준공 : 2017. 12.

사업명

담양 에코허브센터 조성사업

담당자

녹색환경과 강아림

(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역전문기관과 주민참여위원회에 의한 거버넌스를 구성하여 지역사회가 주도하는 커뮤니티형 도시 구현

○ 에너지 제로하우스를 기반으로 신재생에너지시설을 적용하여 담양을 대표하는 친환경지속가능 건축물로 브랜드화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년~2018년

○ 위 치 : 담양군 담양읍 학동리 56-2번지 일원

○ 규 모 : 에코허브센터 1동 건립(A=554.59㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,148백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,148		18	1,048	1,082
국 비	1,289		10	629	650
시 도 비
시군구비	859		8	419	432
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 군 지방재정투자심사 원안 승인 : 2016. 3.

○ 설계용역 계약심사 및 일상감사 : 2016. 3.

○ 담양 에코허브센터 현상설계 공모 : 2016. 9. ~ 2016. 11.

○ 설계 당선작 선정 : 2016. 11.

○ 설계용역 추진 : 2016. 11. ~ 2017. 6.

○ 도 계약심사 및 군 일상감사 : 2017. 7.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2017. 8. ~ 2018. 4.

○ 공사 준공 : 2018. 4.

사업명

첨단문화복합단지 조성사업

담당자

투자유치단 조장훈

(☎ 380-3132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 전원주택단지 조성으로 인구유입 촉진 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011. ~ 2019.

○ 위 치 : 담양읍 가산리, 수북면 두정리․주평리

○ 규 모 : 1,277천㎡

- 세대수 : 1,452세대(전원주택 772, 공동주택 680)

- 상업․업무시설, 교육시설, 의료시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 158,142백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	158,142	3,662	42,309	37,391	74,780
국 비
시 도 비
시군구비	400	400
지 방 채
민간자본	157,742	3,262	42,309	37,391	74,780
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시계획인가  : 2016. 09.

○ 공사 착공     : 2016. 02.

○ 토지분양(1차)  : 2017. 04.

□ 향후계획

○ 토지분양(2차)  : 2017. 09.

○ 공사 준공      : 2019. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : [당초] 1,662억원 ⇒ [변경] 1,581억원

○ 사업기간 : [당초] 2011~2018 ⇒ [변경] 2011~2019

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대나무생태공원 조성사업

담당자

투자유치단 김현수

(☎ 380-3133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광휴양형 및 주거형 인프라 구축 및 쾌적한 주거환경 조성으로 외부인구

유입 및 지역경제 활성화 도모코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006. ~ 2020.

○ 위 치 : 금성면 금성리 일원

○ 규 모 : 671천㎡

- 리조트, 힐링타운, 대나무 오토캠핑장 등

- 도로, 주차장, 하수종말처리장 등 공공시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145,946백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	145,946	20,466	680	54,700	70,100
국 비	6,950	6,950
시 도 비
시군구비	12,896	12,896
지 방 채
민간자본	126,100	620	680	54,700	70,100
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 민간투자협약 체결         : 2012. 04.

○ 군관리계획 결정 승인 고시 : 2013. 11.

○ 개발촉진지구 지정 공고    : 2014. 12.

□ 향후계획

○ 기본계획 변경             : 2017. 08.

○ 실시계획 인가             : 2018. 04.

○ 단계별 사업착수 및 완료   : 2018. 05. ~ 2020. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : [당초] 1,494억원 ⇒ [변경] 1,459억원

○ 사업기간 : [당초] 2006~2015 ⇒ [변경] 2006~2020

사업명

메타세쿼이아지구

농어촌테마공원 조성사업

담당자

안전건설과

정백용(☎380-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○ “물 맑고 볕이 따뜻한 고장”인 담양지역 특유의 독특한 자연․문화․  향토자원을 토대로 메타세쿼이아 가로수길 주변에 농어촌 테마공원   을 조성하여 휴식 및 휴양공간 제공하고,

○ 농촌주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식 및 전통문화 체험공간을   제공하여 도․농 교류 촉진을 통한 농촌지역 경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년간)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 학동리 414번지 일원

○ 규 모 : 테마공원조성 A=50,809㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,672백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,672	9,147	360	165	-
국 비	4,836	4,656	180	-	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	4,836	4,491	180	165	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 진입도로 조성 완료  : 100%

○ 테마공원 조성 완료  : 100%

○ 어린이프로방스 개장 예정  : 2017. 10

사업명

월산권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 정백용(☎380-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활권, 영농권, 수리권 등의 특징에 따라 주민 간 동질성과 유대감을 가진 소규모의 권역을 묶어 특성에 맞는 경관개선, 생활환경정비, 주민역량강화 및 소득기반 확충 등을 통하여 지속가능한 생활터전의 유지 및 최소한의 기초생활수준 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위 치 : 월산면 월산리, 월평리, 화방리 일원

○ 규 모 : 기반확충 4개소, 소득증대 1개소, 경관개선 4개소, 역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,730	2,860	1,126	1,744
국 비	4,011	2,002	788	1,221
시 도 비	10	10	0	0
시군구비	1,709	848	338	523
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 월산권역단위 종합정비사업(H/W) 시행

○ 월산권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 시행

□ 향후계획

○ 월산권역단위 종합정비사업(H/W) 준공

○ 월산권역단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 준공

○ 담양군 및 운영법인 간 협약체결 추진

사업명

무정지구(2단계) 하수관거

정비사업

담당자

상하수도사업소

정대기(☎ 380-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 담양읍 삼다 삼만, 금성면 양지, 정각, 대성등에서 발생하는 생활하수가

미처리 상태로 방류되어 영산강 수질오염을 가중되고 있어 하수관거 및

가정배수설비를 정비하여 쾌적한 농촌주거환경을 조성하는데 기여

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년 11월 ~ 2017년 2월

○ 위 치 :  담양읍 삼다, 삼만리, 금성면 양지, 대성, 평신, 덕성리

○ 규 모 :  오수관로 28,803m, 맨홀 799개소, 배수설비 821가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	14,510	9,904	2,906	1,700	-
국 비	10,157	6,933	2,034	1,190	-
시 도 비
시군구비	4,353	2,971	872	510	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017년 3월 공사완료 및 준공

□ 향후계획

○ 하수도 유지관리 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

수북지구(2단계) 하수관거

정비사업

담당자

상하수도사업소

정대기(☎ 380-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수북면 하수 처리구역의 발생오수를 담양 공공하수처리장으로 이송 처리

하여 주민생활환경개선 및 방류수역인 영산강의 수질개선을 위하여 하수

관거 및 가정 배수설비를 정비하여 쾌적한 농촌 주거환경을 조성하는데

기어코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013년 11월~ 2017년 2월

○ 위 치 :  수북면 일원

○ 규 모 :  오수관로 31,036m, 맨홀 923개소, 배수설비 955가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,454백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,454	9,108	4,046	2,300	-
국 비	10,817	6,375	2,832	1,610	-
시 도 비
시군구비	4,637	2,733	1,214	690	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017년 3월 공사완료 및 준공

□ 향후계획

○ 하수도 유지관리 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

도로와 지하시설물 전산화사업

담당자

민원봉사과  곽종효

(☎380-3288)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 및 지하시설물 자료에 대한 통합 정보 구축으로 도시기반 시설 유지

관리 과학화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 8. 22. ∼ 2018. 12. 31

○ 위 치 : 담양군 일원

○ 규 모

(단위: ㎞, ㎢)

연도별	계	도 로	상수도	하수도	면 적	해당지역(읍)	비 고
계	339.65	108.95	109.87	120.83	24.4	24.4
2015(1차)	70.31	22.62	23.69	24.00	4.73	4.73	추진완료
2016(2차)	68.08	20.72	21.30	26.06	4.64	4.64	추진완료
2017(3차)	57.01	18.70	18.50	19.81	4.26	4.26	추 진 중
2018(4차)	144.25	46.91	46.38	50.96	10.77	10.77	추진예정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,753.2 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투 자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,753.2	340	334	300	779.2
국 비	1,047.52	200	200	180	467.52
시군구비	705.68	140	134	120	311.68

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 도로 및 지하시설물 기준점 측량

○ 도로 시설물조사 및 상·하수도 관로조사 및 탐사

□ 향후계획

○ 도로시설물 및 상·하수도 정위치·구조화 편집

○ 공공측량 자체 현장 검수 및 성과심사 승인

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

담양군 국민체육센터건립

담당자

문화체육과

옥승준(☎380-3808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 체력증진을 위한 인프라 확충 및 여가생활 공간조성을 통해 생활체육활성화와 건강증진 및 건전한 여가선용의 기회를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1. ~ 2018. 6.

○ 위 치 : 담양군 만성리 460번지 일원

○ 규 모 : 9,860㎡(체육시설 8,580㎡, 진입도로 1,280㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,200	3,200	1,500	3,500	1,000
국 비	0
시 도 비	0
시군구비	6,000		1,500	3,500	1,000
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	3,200	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 국민체육센터건립 기본 및 실시설계용역 완료 : 2015. 8. 7.

○ 도 계약심사 및 군 일상감사 완료 : 2015. 11. 18.

○ 건축공사 총괄계약에 의거 1차분 계약체결 : 2015. 12. 24

○ 건축공사 착공 : 2015 .12. 31.

○ 건축공사 1차분 준공 완료 : 2016 .12. 24.

○ 건축공사 총괄계약에 의거 2차분 공사 추진 : 2017. 1. 23.

○ 국민체육센터 건립공사 1차 기성검사 추진 : 2017. 8. 25.

□ 향후계획

○ 주차장조성 실시설계 : 2017. 9. ~ 2017. 10.

○ 내부 인테리어 공사 실시 : 2017. 9. ~ 2017. 12.

○ 개관 및 운영 : 2018. 6.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

담양읍 소도읍 육성사업

담당자

도시디자인과

김진한(☎380-3100)

□ 필요성 및 기대효과

○ 대나무 체험관 등 대나무를 주제로 한 테마 공간 조성

○ 생태숲 등 메타세쿼이아 가로수길과 연계한 테마 공간 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2007~2020년

○ 위치 : 담양읍 백동리․천변리, 학동리 일원

○ 사업규모 : 대나무 바이오단지(176,157㎡)

메타세쿼이아 전통놀이마당(326,393㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 94,132 백만원 (국비 5,000 특교세 5,000 도비 1,050,

시군구비15,495, 민자 64,262)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	90,807	67,600	116	10,439	12,652
국 비	5,000	5,000
시 도 비	1,050	1,050
시군구비	15,495	9,550	2	3,439	2,504
지 방 채
민간자본	64,262	47,000	114	7,000	10,148
기타(특교세)	5,000	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85 %)

○ 2007년  5월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2007년 12월  기본계획 및 실시설계

○ 2009년 12월  군 기본계획(변경) 승인

○ 2010년  8월  문화재 발굴조사 허가

○ 2010년  8월  농업진흥지역 해제 고시

○ 2011년  1월  실시계획인가 고시(전통놀이마당)

○ 2011년  3월  공사착공(전통놀이마당)

○ 2012년  6월  공사준공(전통놀이마당)

○ 2013년  3월  실시계획인가 고시(담양메타프로방스조성사업)

○ 2013년  10월 ~ 2016년 2월 실시계획변경인가 7차례(담양메타프로방스조성사업)

○ 2014년  1월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월 ~ 2015년 6월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

○ 2015년  4월~6월  실시계획 인가에 따른 환경영향평가 협의

○ 2015년  7월  대나무바이오단지 조성사업 실시계획 인가

○ 2015년 12월  대나무바이오단지 조성사업 실시계획 실시계획(변경) 인가

○ 2016년  7월  대나무바이오단지 조성사업 실시계획 비점오염원 설치 신고

□ 향후계획

○ 대나무바이오단지 문화재 시굴 및 정밀조사 용역완료 : 2018. 6.

○ 담양메타프로방스조성사업 공사 완료 : 2018. 12.

○ 대나무바이오단지 공사 완료 : 2020. 12.

사업명

녹색관광메타길조성사업

담당자

도시디자인과

하태윤(☎380-3103)

□ 필요성 및 기대효과

○ 메타세쿼이아 가로수길 주변의 체계적 개발과 관광자원화로 관광객 유치

및 다양한 여가선용 기회 제공

○ 4계절 관광과 친수가 형성되는 아름다운 가로수길 조성

□ 사업개요

○ 기간 : 2012년 ~ 2016년

○ 위치 : 담양읍 학동리 일원

○ 사업규모 : 광장, 실개천, 야간경관 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원(국비 2,280, 시군구비 1,520)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년도	2017년	2018년 이후
계	3,800	2,721	1,079
국 비	2,280	1,633	647
시 도 비
시군구비	1,520	1,088	432
지 방 채
민간자본
기타(특교세)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011년  6월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2011년  10월 녹색관광 메타길조성사업계획 확정

○ 2012년  4월  디자인계획수립용역 시행

○ 2012년 10월  디자인계획수립용역 준공

○ 2012년 10월  실시설계용역(1차분) 시행

○ 2013년  6월  실시설계용역(1차분) 준공

○ 2013년 12월  사업계획 변경승인

○ 2014년  3월 ~ 2015년 1월  조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진

○ 2014년  5월  수변공사 완료

○ 2014년 4월~  2015년 5월 야간경관사업 기본계획 수립용역

○ 2015년 1월~  2015년 12월 녹색관광메타길조성사업 시행(광장)

○ 2015년 6월 ~ 2015년 12월 메타길 야간경관사업추진

○ 2016년 5월 ~ 2016년 12월 메타길 연결통로 설치공사

○ 2016년 5월 ~ 2016년 12월 어린이프로방스 테마공원 조성사업

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리

사업명

한재골 생태문화공원 조성

담당자

도시디자인과 유경관(☎380-3117)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연경관이 훼손되지 않도록 자연친화적인 공원 조성을 통해 군민은 물론 내방객의 건전한 휴식 및 여과, 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018

○ 위 치 : 대전면 평장리 산12-4번지일원

○ 규 모 : 주차장 2개소, 산책로, 편익시설, 화장실, 수목원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원(국비2,820, 군비 1,880)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,700	1,399	455	2,846
국 비	2,820	839	273	1,708
도 비
군 비	1,880	560	182	1,138
지 방 채	-	-
민간자본
기 타	-	-			-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  35%)

○ 공원내 편익시설(화장실 등)설치 : 2014. 5 ~ 7

○ 한재골 주차장 조성사업추진 : 2015. 6. ~2017. 10.

○ 한재골 생태문화공원 조성사업(2차) 실시설계 용역추진 : 2017. 4 ~ 10

□ 향후계획

○ 한재골 생태문화공원 주차장 조성사업 준공 : 2017. 10.

○ 한재골 생태문화공원 조성사업 추진  : 2017. 10 ~ 2018. 10

사업명

담양 일반산업단지 조성

담당자

지역경제과 정종일

(☎380-3051)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업용지의 안정적 공급으로 신산업 거점단지 조성을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양읍 삼만리 및 금성면 원천리 일원

○ 사업규모 : 580,507㎡

○ 총사업비 : 93,707백만원

○ 시 행 자 : 담양그린개발(담양군)

(단위 : 억원)

합계	부지조성	공업용수	오폐수처리장	진입도로
93,707	586.6	58.8	54.67	237

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 93,707백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	93,707	61,441	1,600	26,410	4,256
국 비	33,407	11,200	1,200	17,136	3,871
시 도 비	2,000	2,000
시군구비	1,640	254	400	594	392
지 방 채
민간자본
기 타	56,660	47,987	5,992	2,681

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 산업단지 사업시행자 선정 및 SPC 설립 : 2012. 8. ~ 2013. 10.

○ 기공식 및 산단입주 MOU 체결(5개사) : 2014. 10. 23.

○ 산업단지 단지계획 승인 및 지형도면 변경 고시 : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 산업단지 진입도로 개설공사 사업준공 : 2017. 12.

○ 산업단지 공업용수 개발사업 사업준공 : 2018. 6.

사업명

공예센터 및 복합문화거리 조성

담당자

지역경제과 김대광

(☎380-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순 시설중심의 공예센터가 아닌 복합문화의 거리 연계 조성으로

연 700만  이상의 관광객을 대상으로 한 지역 주민의 소득창출 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 담양읍 향교리 1구 일원

○ 규 모 : 공예센터(2층 296.21㎡), 복합문화거리 조성(광장, 바닥정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	270	1,009	1,721
국 비	1,500	135	504.5	860.5
시 도 비
시군구비	1,500	135	504.5	860.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 공예센터 건립공사 실시설계 : 2015. 4. 6. ~ 6. 5.

○ 공예센터 건립공사 시행 : 2016. 1. 7. ~ 2017. 6. 27.

○ 복합문화거리 조성공사 착공 : 2016. 1. 28.

○ 복합문화거리 지중화 공사 시행 : 2017. 2. ~ 3.

○ 복합문화거리 바닥공사 시행 : 2017. 6. ~

□ 향후계획

○ 복합문화거리 조성공사 준공 : 2017. 8. 30.

○ 공예센터 개소 및 활성화 프로그램 운영 : 2017. 9. 1. ~

사업명

문화회관 인근 공영주차장 조성

담당자

지역경제과

김영중(☎380-3054)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공영주차장 부족으로 관광1번지인 담양에 불법주정차로 인한 교통혼잡과        교통사고 위험 산재.

○ 또한, 터미널 인접지인 문화회관 주차장도 부족하여 주변 도로에 불법        주정차가 난립하는 등 도심미관이 심각하게 저해되고 있어 이를 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2018. 12월.

○ 위 치 : 담양군 담양읍 남산리 284-1번지 일원

○ 규 모 : 부지매입 8,052㎡, 기반조성, 노외주차장 조성 250면.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800			1,500	1,300
국 비	1,900			750	650
시 도 비
시군구비	1,900			750	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정 투융자 심사 : 2016. 5.

○ 편입토지선정 및 감정평가 실시 : 2017. 5 ~ 6월.

○ 토지보상 협의 : 2017. 7 ~ 8월.

□ 향후계획

○ 부지매입 : 2017. 8월 부터

○ 군 관리계획(주차장) 결정용역 : 2017. 9 ~ 12월.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 1 ~ 4월.

○ 기반 및 주차장 조성 공사 : 2018. 5 ~ 10월.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 담양군에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 담양군에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	담양군 하수관거정비 임대형민자사업	담양하수관거(주)	59,001	19,175	2,828	36,998	20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

담양군 하수관거정비 임대형 민자사업

담당자

상하수도사업소 김성민

(☎380-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○기존 합류식 노후 불량관거 개량 및 관거 신설로 하수관거 기능강화

○관거정비를 통한 침입수, 유입수 저감으로 하수처리시설의 운영효율

개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006.6.26 ~ 2009.11.25

○ 위    치 : 담양군 담양읍 지침리, 담주리, 객사리, 향교리, 양각리,

남산리, 반룡리, 강쟁리

○ 민간사업자 : 담양하수관거(주)

○ 총사업비 : 59,001백만원

○ 사업규모 : 오수관거 26.7km  우수관거 11.1km  배수설비 1,422가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	59,001	19,175	2,828	2,836	34,162
국 비	34,423	11,532	1,656	1,656	19,579
시 도 비
시군구비	19,018	7,643	1,172	1,180	14,583
기 타

□ 추진단계(운영 중)

○담양읍 하수관거정비 민간투자사업 시설운영 : ‘09.11.~ ’28.11.(20년)

□ 향후계획

○설비투자비 분기별 원리금 상환 및 민간위탁 운영비 지급

사업명

담양군 하수관거정비 임대형 민자사업

담당자

상하수도사업소 김성민

(☎380-3333)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측, 계약조건 등에 변경이 있는

경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

(단위 : 백만원)

구 분	당초	현재	비고
사업규모	-	-	변경없음
총사업비	26,520	26,389
사업기간	2005.11.1~2009.12.31 (50개월)	2006.6.26~2009.11.25 (41개월)