109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 담양군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
개구리 생태공원 조성	10,000	4,160	1,500	300	2018	2012	90
대전천 생태하천 복원	8,500	3,687	102	4,711	2019	2012	38
생태 교통시스템 구축	4,122	2,978	1,144	-	2018	2016	80
에코허브센터 조성사업	2,148	-	606	1,542	2018	2016	95
첨단문화복합단지 조성사업	160,000	44,200	28,000	87,800	2020	2013(1차) 2016(2차)	45
대나무생태공원 조성사업	145,946	20,466		125,480	2020	2013	5
메타세쿼이아지구 농어촌테마공원조성	9,672	9,507	165	-	2017	2011	100
월산권역단위 종합정비사업	5,730	4,126	652	952	2018	2011	90
무정지구하수관거 정비사업(2단계)	17,545	17,483	62	0	2018	2012	95
수북지구하수관거 정비사업(2단계)	15,658	15,550	108	0	2017	2012	100
도로와 지하시설물 전산화사업	1,753	674	300	779.2	2019	2015	56
담양군 국민체육센터건립	9,200	3,200	6,000		2018	2013	100
담양읍 소도읍 육성사업	90,807	67,716	2,589	20,502	2020	2007	90
한재골생태문화공원조성	4,700	1,942	82	2676	2019	2013	60
담양일반산업단지조성	101,220	79,641	1,582	3,258	2018	2013	80
공예센터및복합문화거리조성	3,000	1,348	1,171	253	2018	2013	100
문화회관 인근 공영주차장 조성	3,800	1,400	1,440	2,360	2019	2016	39
담빛 야외음악공원 조성 사업	5,100			5,100	2019	2017	20
담빛 역사관광체험관 조성사업	2,500			2,500	2019	2017	20
담양지명천년 기념행사	190	-	-	190	2018	2017	50
소하천정비사업	6,548	1,200	2,776	2,572	2018	2016	90
담양대나무축제	720		720		2017	2017	100
담양 산타축제	200		200		2018	2016	90

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

개구리생태공원조성

담당자

녹색환경과 송국

(☎380-2950)

□ 사업목적 및 필요성

○ 법적 보호종 증식 등 생물 다양성 보전과 개구리를 통한 환경체험교육장       으로서의 기능을 다할 수 있는 생태원이 되도록 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양군 담양읍 학동리 55-1번지 일원

○ 사 업 비 : 100억원(국비 50, 지방비 50)

○ 사업기간 : 2012. 01. ~ 2018. 12.

○ 사업내용 : 생태관 781㎡, 온실 566㎡, 야외서식생태학습장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,000	4,160	2,643	300	2,897
국 비	5,000	2,080	1,322	-	1,598
군 비	5,000	2,080	1,321	300	1,299

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 건축공사(전기, 통신, 소방, 조경) 착공 및 준공 : 2015. 1. ~ 2017. 9.

○ 전시물 착공 및 마무리 단계 : 2016. 9. ~

□ 향후계획

○ 내부 전시물 제작ㆍ설치 완공 : 2018. 10.

○ 개구리 생태공원 개관 : 2018. 10.

사업명

대전천 생태하천 복원사업

담당자

녹색환경과 강아림

(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활하수 및 공장폐수의 재처리를 통한 영산강 수질 개선 및 수질오염총량 관리제 삭감량 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 1. ~2019. 12. 31.

○ 위 치 : 담양군 대전면 응용리 일원

○ 규 모 : 18,800㎡(수질정화습지 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,500	3,687	102	3,105	1,606
국 비	5,100	2,212	61	1,863	964
군 비	3,400	1,475	41	1,242	642

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 완료      : 2011. 10.

○ 개발제한구역 관리계획 변경	: 2012.  7.

○ 전라남도 지방투․융자 심사	: 2012. 12.

○ 기본 및 실시설계 용역	: 2013.  4.

○ 행정절차 이행을 위한 용역 추진        : 2017.  8. ~ 2017. 12.

-  도시계획 시설결정 등 용역(군계획시설 결정, 경관성․교통성 검토, 사전재해영향평가 등)

-  소규모환경영향평가 용역

※ 사업계획(위치 등) 변경승인 완료 – 영산강청

□ 향후계획

○ 소규모환경영향평가 사전협의(영산강청)	: 2018. 3.

○ 위치・사업계획 조정에 따른 협의(익산청): 2018. 3.

○ 행정절차 이행

-  하천점용허가(국가하천구역내 / 익산지방국토관리청)

-  소규모환경영향평가 협의(익산청 → 영산강청)

-  농지전용(사업대상지 내)

○ 공사착공	: 2018. 10.

□ 사업변경 내역 : 총사업비 변경

○ 내  용 : 당초 8,000백만원 → 변경 8,500백만원(500백만원 증)

○ 사  유 : 문화재 유존지역으로 발굴조사를 위한 비용 필요

사업명

생태교통시스템 구축

담당자

녹색환경과 강아림

(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주요 관광지 주변의 교통체증에 의한 차량정체와 주차난 해소

○ 화석연료 사용에 따른 이산화탄소 발생량 저감으로 대기질 개선

○ 관광객들의 편의 도모 및 이색 볼거리 제공으로 관광활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년~2018년

○ 위 치 : 담양군 일원

○ 규 모 : 충전시설 2개소, 전기버스 4대, 전기자동차 2대, 버스정보시스템 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,122백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,122	2,978	1,144
국 비	2,885	2,085	800
군 비	1,237	893	344

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 생태교통시스템 구축사업 위수탁 협약 체결(한국환경공단) : 2015. 12.

○ 도 지방재정투자심사 조건부 승인 : 2016. 2.24.

○ 친환경 전기버스(3대) 및 충전시설 구매 : 2017. 5.

○ 생태교통시스템 모니터링 용역 발주 : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 전기자동차 및 친환경전기버스(1대) 구매 : 2018. 5.

○ 전기버스 충전시설 추가 설치 : 2018. 7.

○ 버스관리시스템 구축 및 전기자동차(2대) 구매 : 2018. 11.

사업명

에코허브센터 조성사업

담당자

녹색환경과 강아림

(☎380-3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지시설을 적용하여 담양을 대표하는 친환경지속가능 건축물로 브랜드화

○ 다양한 환경 교육과 전시프로그램 진행을 통해 친환경 지속가능도시 담양에 대한 홍보 및 체험 공간 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양군 담양읍 학동리 56-3번지 일원

○ 사업기간 : 2016. 1. 1. ~2018. 12. 31.

○ 사업내용 : 에코센터 1동 건립 (A=554.59㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,148백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,148		606	1,542
국 비	1,504		424	1,080
군 비	644		182	462

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95%)

○ 군 지방재정투자심사 원안 승인	: 2016. 3.

○ 설계 용역 계약심사 및 일상감사	: 2016. 7.

○ 담양에코허브센터 현상설계공모 공고	: 2016. 9.

○ 설계 당선작 선정	: 2016.11.

○ BF예비인증 심사	: 2017. 5.

○ 설계 용역 추진	: 2016.11. ~ 2017. 6.

○ 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행	: 2017. 7.

○ 공사추진 (㈜중해건설)	: 2017. 9. ~ 2018. 6.

□ 향후계획

○ 실내 전시공사	: 2018. 8. ~ 2018. 9.

○ 시설물 시운전	: 2018. 9.

○ 시설물 개관	: 2018. 9.

사업명

담양 첨단문화복합단지 도시개발사업

담당자

투자유치단 윤일준
(☎ 380-3132)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 전원주택단지 조성으로 인구유입 촉진 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011~2020

○ 위 치 : 담양읍 가산리, 수북면 두정리․주평리

○ 규 모 : 1,277천㎡

- 세대수 1,452세대(단독주택 772, 공동주택 680)

- 상업․업무시설, 교육시설, 의료시설, 행정 및 커뮤니티시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 160,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	160,000	44,200	28,000	42,330	45,470
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	400	400	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	159,600	43,800	28,000	42,330	45,470
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 실시계획인가	: 2016. 9.

○ 공사 착공	: 2017. 2.

○ 토지분양(1차, 2차, 상업용지 등)	: 2017. 4.~12.

□ 향후계획

○ 토지분양(3차)	: 2018. 7.

○ 도시개발사업 준공	: 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : [당초] 1,581억원 ⇒ [변경] 1,600억원

○ 사업기간 : [당초] 2011~2019 ⇒ [변경] 2011~2020

사업명

대나무생태공원 조성사업

담당자

투자유치단 김현수
(☎ 380-3133)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광휴양형‧주거형 인프라 구축 및 쾌적한 주거환경 조성으로 외부인구

유입과 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2006~2020

○ 위 치 : 금성면 금성리 일원

○ 규 모 : 671천㎡

- 리조트, 힐링타운, 대나무 오토캠핑장 등

- 도로, 주차장, 하수종말처리장 등 공공시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 145,946백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	145,946	20,466			125,480
국 비	-	6,950
시 도 비	-
시군구비	12,896	12,896
지 방 채	-
민간자본	126,100	620			125,480
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 민간투자협약 체결 : 2012. 4.

○ 군 관리계획 결정 승인 고시 : 2013. 11.

○ 개발촉진지구 지정 공고 : 2014. 12.

□ 향후계획

○ 기본계획 변경 : 2018. 12

○ 실시계획 인가 : 2019

○ 단계별 사업착수 및 완료 : 2019.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : [당초] 1,494억원 ⇒ [변경] 1,459억원

○ 사업기간 : [당초] 2006~2015 ⇒ [변경] 2006~2020

사업명

메타세쿼이아지구

농어촌테마공원 조성사업

담당자

안전건설과 정백용

(☎380-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○ “물 맑고 볕이 따뜻한 고장”인 담양지역 특유의 독특한 자연·문화·

향토자원을 토대로 메타세쿼이아 가로수길 주변에 농어촌 테마공원

을 조성하여 휴식 및 휴양공간 제공하고,

○ 농촌주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식 및 전통문화 체험공간을

제공하여 도·농 교류 촉진을 통한 농촌지역 경제활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2016년(5년간)

○ 위 치 : 담양군 담양읍 학동리 414번지 일원

○ 규 모 : 테마공원조성 A=50,809㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,672백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,672	9,507	165
국 비	4,836	4,836
시 도 비
시군구비	4,836	4,671	165
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 진입도로 조성 완료 : 100%

○ 테마공원 조성 완료 : 100%

○ 어린이 프로방스 개장 : 2017.10

사업명

월산권역단위 종합정비사업

담당자

안전건설과 정백용

(☎380-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활권, 영농권, 수리권 등의 특징에 따라 주민 간 동질성과 유대감을 가       진 소규모의 권역을 묶어 특성에 맞는 경관개선, 생활환경정비, 주민역량       강화 및 소득기반 확충 등을 통하여 지속가능한 생활터전의 유지 및 최       소한의 기초생활수준 보장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2017년

○ 위 치 : 월산면 월산리, 월평리, 화방리 일원

○ 규 모 : 기반확충 4개소, 소득증대 1개소, 경관개선 4개소, 역량강화 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,730	3,986	792	952
국 비	4,011	2,788	557	666
시 도 비	10	10
시군구비	1,709	1,188	235	286
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 월산권역단위 종합정비사업 추진(H/W)

○ 월산권역 단위 종합정비 지역역량강화사업(S/W) 시행

□ 향후계획

○ 월산권역단위 종합정비사업(H/W) 준공

○ 담양군 및 운영법인 간 협약체결 추진

사업명

무정지구하수관거 정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 하태윤

(☎380-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활하수 적정처리로 수질 오염을 최소화하여 자연 생태계 보존 및 주민 보건 위생 향상에 기여

○ 마을에서 발생되는 생활하수의 적정처리로 지하수 토양 오염을 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01 ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 담양읍, 금성면 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=28.01km 배수설비 782가구 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,545백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	17,545	17,483	62
국 비	12,281	12,281
시 도 비
시군구비	5,264	5,202	62
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 무정지구 1차분 준공 : 2014. 09. 24.

○ 무정지구 2차분 준공 : 2015. 05. 03.

○ 무정지구 3차분 준공 : 2016. 07. 17.

○ 무정지구 4차분 준공 : 2017. 07. 31.

○ 무정지구 차집관로 정비사업 : 2017. 11.

○ 무정지구 차집관로 정비사업 준공 : 2017. 11.

□ 향후계획

○ 하수관로 운영 및 유지 관리

사업명

수북지구 하수관거 정비사업(2단계)

담당자

상하수도사업소 하태윤

(☎061-380-3334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활하수 적정처리로 수질 오염을 최소화하여 자연 생태계 보존 및 주민 보건 위생 향상에 기여

○ 마을에서 발생되는 생활하수의 적정처리로 지하수 토양 오염을 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 01 ~ 2017. 03

○ 위 치 : 수북면 일원

○ 규 모 : 오수관로 L=29.22km 배수설비 862가구 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,658백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,658	15,550		0	0
국 비	10,818	10,818
시 도 비
시군구비	4,840	4,732	108	0	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100 %)

○ 수북지구 1차분 준공 : 2014. 11. 04.

○ 수북지구 2차분 준공 : 2015. 03. 11.

○ 수북지구 3차분 준공 : 2016. 04. 23.

○ 수북지구 4차분 준공 : 2017. 03. 31.

□ 향후계획

○ 하수관로 운영 및 유지 관리

사업명

도로와 지하시설물 전산화사업

담당자

열린민원과 곽종효

(☎380-3266)

□ 사업목적 및 필요성

○ 담양읍 일원 도로 및 지하시설물 중 상·하수도, 도로에 대한 조사·탐사

및 DB 통합정보 구축으로 시설물 관리의 과학화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)

○ 위 치 : 담양읍 일원

○ 규 모 : 344.66km(도로 108.95, 상수도 111.0, 하수도 124.71)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,753.2백만원(국비 1,051.9, 군비 701.3)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1.753.2	674	300	216.7	562.5
국 비	1,051.9	400	180	130	341.9
시 도 비
시군구비	701.3	274	120	86.7	220.6
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

연도별	총사업비	계	도 로	상수도	하수도	면 적	비 고
계	974	200.36	62.04	64.57	73.75	24.41
2015(1차)	340	70.31	22.62	23.69	24.00	4.73	완 료
2016(2차)	334	68.08	20.72	21.30	26.06	4.64	완 료
2017(3차)	300	61.97	18.70	19.58	23.69	4.26	완 료

□ 향후계획

○ 2018년 ~ 2019년 까지 144.3km 조사·탐사 및 DB구축 완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 334.81km, 현재 344.66km(증 9.85km)

○ 사업기간 : 당초 2015 ~ 2017년(3년), 현재 2015년 ~ 2019년(5년)

○ 변경사유 : 탐사물량·성과심사비 변경 및 국토부 국고보조금 교부액 감소에 따른                      사업기간 연장에 의함.

사업명

담양국민체육센터 건립공사

담당자

문화체육과 옥승준

(☎380-2808)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 체력증진을 위한 인프라 확충 및 여가생활 공간조성을 통해 생활체육활성화, 건강증진 및 건전한 여가선용의 기회를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 1 ~ 2018. 6

○ 위 치 : 담양읍 만성리 460번지 일원

○ 규 모 : 수영장(25m*6레인), 스파풀, 유아풀, 다목적실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,200
국 비	3,200	3,200
시 도 비
시군구비	6,000		6,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 국민체육센터 설계 및 착공 : 2017

□ 향후계획

○ 국민체육센터 준공 완료 : 2018. 5. 31

○ 국민체육센터 시범운영 및 정식 개장 :  2018. 6

○ 초중고 및 군부대와 협약으로 수영장 활성화 방안 추진

○ 다양한 연령층에 어울리는 프로그램 개발로 이용객 만족도 제고

사업명

담양읍 소도읍육성사업

담당자

도시디자인과 김진한

(☎380-3103)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대나무 체험관 등 대나무를 주제로 한 테마 공간 조성

○ 생태숲 등 메타세쿼이아 가로수길과 연계한 테마 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007~2020년

○ 위 치 : 담양읍 백동리․천변리, 학동리 일원

○ 규 모 : 대나무 바이오단지(176,157㎡)

메타세쿼이아 전통놀이마당(326,393㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 90,807 백만원 (국비 5,000 특교세 5,000 도비 1,050,

시군구비15,495, 민자 64,262)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	90,807	67,716	2,589	9,149	11,353
국 비	5,000	5,000
시 도 비	1,050	1,050
시군구비	15,495	9,552	2,589	2,149	1,205
지 방 채
민간자본	64,262	47,114		7,000	10,148
기 타	5,000	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   90%)

○ 2007년  3월  소도읍육성 사업계획 확정

○ 2007년  5월  지방재정투융자 심사 승인

○ 2007년 12월  기본계획 및 실시설계

○ 2009년 12월  군 기본계획(변경) 승인

○ 2010년  8월  문화재 발굴조사 허가

○ 2010년  8월  농업진흥지역 해제 고시

○ 2011년  1월  실시계획인가 고시(전통놀이마당)

○ 2011년  3월  공사착공(전통놀이마0.당)

사업명	담양읍 소도읍육성사업	담당자	도시디자인과 김진한(☎380-3103)
○ 2012년 6월 공사준공(전통놀이마당) ○ 2012년 6월 공사준공(전통놀이마당) ○ 2013년 3월 실시계획인가 고시(담양메타프로방스조성사업) ○ 2013년 10월 ~ 2016년 2월 실시계획변경인가 7차례(담양메타프로방스조성사업) ○ 2014년 1월 사업계획 변경승인 ○ 2014년 3월 ~ 2015년 6월 조성계획 변경 및 실시설계 용역 추진 ○ 2015년 1월 조성계획 변경 ○ 2015년 3월 실시계획 인가 사전열람공고 ○ 2015년 4월~6월 실시계획 인가에 따른 환경영향평가 협의 ○ 2015년 7월 대나무바이오단지 조성사업 실시계획 인가 ○ 2015년 12월 대나무바이오단지 조성사업 실시계획 실시계획(변경) 인가 ○ 2016년 7월 대나무바이오단지 조성사업 실시계획 비점오염원 설치 신고 ○ 2017년 6월 대나무바이오단지 조성사업 문화재정밀발굴조사 용역시행 ○ 2017년 8월 대나무바이오단지 조성사업 수용재결 ○ 2017년 7월 사업시행계획 인가처분 무효판결(담양 메타프로방스조성사업) ○ 2017년 8월 사업시행자 지정고시(담양 메타프로방스조성사업) ○ 2017년 10월 2017구합800 실시계획인가 무효 소송 □ 향후계획 ○ 2018년 4월~ 대나무바이오단지 조성사업(천변리) 시행 ○ 2018년 5월 대나무바이오단지 조성사업 문화재정밀발굴조사 용역완료 ○ 대나무바이오단지 조성사업(천변리) 공사완료 : 2019. 2. ○ 담양메타프로방스조성사업 공사 완료 : 2019. 12. ○ 대나무바이오단지(백동리) 공사 완료 : 2020. 12.

사업명

한재골 생태문화공원 조성

담당자

도시디자인과

유경관(☎380-3117)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연경관이 훼손되지 않도록 자연친화적인 공원 조성을 통해
군민은 물론 내방객의 건전한 휴식 및 여과, 문화공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2019

○ 위 치 : 대전면 평장리 산12-4번지일원

○ 규 모 : 주차장 2개소, 산책로, 편익시설, 화장실, 수목원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원(국비2,820, 군비 1,880)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,700	1,942	82	713	1,963
국 비	2,820	1,165	49	428	1,178
시 도 비
시군구비	1,823	777	33	285	785
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 공원내 편익시설(화장실 등)설치 : 2014. 5. ~ 7.

○ 한재골 주차장 조성사업추진 완료 : 2015. 6. ~ 2018. 8.

□ 향후계획

○ 한재골 생태문화공원 조성사업(2차) 실시설계 용역추진 : 2018. 9.

○ 한재골 생태공원 조성사업 추진 : 2018. 10. ~

- 숲유치원, 어린이도서관, 숲놀이터 등 연중 이용 시설물 설치

○ 한재골 숲유치원, 어린이도서관 등 위탁운영계획 수립 : 2019. 상반기

○ 한재골 근린공원 위탁 운영 : 2019. 하반기

사업명

담양 일반산업단지 조성

담당자

지역경제과 조장훈

(☎380-3051)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업용지의 안정적 공급으로 신산업 거점단지 조성을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 위    치 : 담양읍 삼만리 및 금성면 원천리 일원

○ 사업규모 : 580,507㎡

○ 총사업비 : 101,220백만원

○ 시 행 자 : 담양그린개발(담양군)

(단위 : 억원)

합계	부지조성	공업용수	오폐수처리장	진입도로
1,012.2	666.1	69.5	26.6	250

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 101,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	101,220	96,380	1,582	2,020	1,238
국 비	33,810	28,970	1,582	2,020	1,238
시 도 비	2,000	2,000	-	-	-
시군구비	2,800	2,800	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	62,610	62,610	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 산업단지 사업시행자 선정 및 SPC 설립 : 2012. 8. ~ 2013. 10.

○ 기공식 및 산단입주 MOU 체결(5개사) : 2014. 10. 23.

○ 산업단지 부지조성공사 준공 : 2017. 4.

○ 산업단지 단지계획 승인 및 지형도면 변경 고시 : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 산업단지 공업용수 개발사업 사업준공 : 2018. 12.

사업명

공예센터 및 복합문화거리 조성

담당자

지역경제과 김대광

(☎380-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순 시설중심의 공예센터가 아닌 복합문화의 거리 연계 조성으로

연 700만 이상의 관광객을 대상으로 한 지역 주민의 소득창출 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 담양읍 향교리 1구 일원

○ 규 모 : 공예센터(2층 296.21㎡), 복합문화거리 조성(광장, 바닥정비 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	1,348	1,171	253	-
국 비	1,500	674	585.1	126.5	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,500	674	585.1	126.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 228백만원은 예산절감 및 집행잔액임

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공예센터 건립공사 실시설계 : 2015. 4. 6. ~ 6. 5.

○ 공예센터 건립공사 시행 : 2016. 1. 7. ~ 2017. 6. 29.

○ 복합문화거리 조성공사 시행 : 2016. 1. 28. ~ 2017. 9. 6.

□ 향후계획

○ 공예센터 체험 등 활성화 프로그램 운영 : 연중

○ 복합문화거리 주민지원사업 추진 : 연중

사업명

문화회관 인근 공영주차장 조성

담당자

지역경제과

김영중(☎380-3054)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공영주차장 부족으로 관광1번지인 담양에 불법주정차로 인한 교통혼잡과        교통사고 위험 산재.

○ 또한, 터미널 인접지인 문화회관 주차장도 부족하여 주변 도로에 불법        주정차가 난립하는 등 도심미관이 심각하게 저해되고 있어 이를 해소하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 5월 ~ 2019. 12월.

○ 위 치 : 담양군 담양읍 남산리 284-1번지 일원

○ 규 모 : 부지매입 8,052㎡, 기반조성, 노외주차장 조성 250면.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800		1,440	1,300	1,060
국 비	1,900		720	650	530
시 도 비
시군구비	1,900		720	650	530
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

○ 지방재정 투융자 심사 : 2016. 5.

○ 편입토지선정 및 감정평가 실시 : 2017. 5 ~ 6월.

○ 토지보상 협의 : 2017. 7 ~ 12월

□ 향후계획

○ 부지매입 : 2017. 8월 부터

○ 군 관리계획(주차장) 결정용역 : 2017. 9 ~ 12월.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 1 ~ 4월.

○ 기반 및 주차장 조성 공사 : 2018. 5 ~ 10월.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

담빛 역사관광체험관 조성사업

담당자

문화체육과 이제민

(☎380-2802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관방제림 문화재 등을 연계하여 지역민과 방문객들에게 문화재 전시･체험과 담양 천년의 역사를 담은 아카이브관 등 자연과 문화가 공존하는 ｢담빛 역사관광체험관｣ 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2019

○ 위 치 : 담양군 담양읍 객사리 10-2 일대

○ 규 모 : 아카이브관동 324㎡, 체험·전시관동 316㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,500			1,500	1,000
국 비	1,500			900	600
시 도 비
시군구비	1,000			600	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘18년도 지특사업 예산 신청 : 2017. 2.

○ 실과단소 관련법 검토협의 : 2017. 3.

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 : 2017. 5. 30. ~ 8. 31.

○ 지방재정 투자심사 승인 : 2017. 6.

○ ‘18년도 지특 신청사업 확정 : 2017. 9. 21.

○ 문화재 현상변경 허가 승인 : 2017. 12. 27.

○ 실시설계 용역 공모 추진(유찰) : 2018. 1. ~ 2.

○ 실시설계 용역 계약(실적 가격입찰) : 2017. 3. (기간 3. 30. ~ 7. 27.)

□ 향후계획

○ 실시설계 용역 중간보고 : 2018. 7.

○ 도 계약심사 : 2018. 8.

○ 착공 및 준공 : 2018. 9. ~ 2019. 12.

사업명

담양 지명천년 기념행사

담당자

지속가능경영기획실 김동진

(☎381-3202)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년 담양지명 천년의 해를 맞이하여 새천년 첫날을 기념하는 행사와       천년축제 분위기 조성으로 담양지명천년의 의미를 담아 담양경제 재도약       기회로 이용하고 미래를 이어갈 청소년들에게 담양의 정신적 기조 인계

○ 과거 문화유산 재정비 및 후손들을 위한 먹거리 기반조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2018. 3.(4개월)

○ 위 치 : 담양종합체육관 일원

○ 규 모 : 담빛경관조명 시설물 설치, 새천년 첫날 기념행사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :    190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	190			190
국 비
시 도 비
시군구비	190			190
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 새천년 첫날 기념행사 및 담빛경관조명 계획수립 : 2017. 10.

○ 새천년 첫날 기념행사 및 담빛 경관조명 세부계획 수립 : 2017. 11.

○ 담빛경관조명 시설물 설치 : 2017. 12.

□ 향후계획

○ 새천년 첫날 기념행사 개최 : 2018. 1. 1.

○ 담빛경관조명 시설물 관리 및 사업완료 : 2018.

사업명

소하천정비사업

담당자

안전건설과 하창원

(☎380-2651)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소하천 연안의 농경지와 가옥의 홍수피해예방 등 안정된 영농생활 유지       하고 무분별한 개발을 방지하여 지역주민의 여가공간 확보 및 친수공간

조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 01 ~ 2018. 12

○ 위 치 : 고서면 원강리 외 3개면(무정면, 남면, 금성면)

○ 규 모 : 소하천정비 L=2.0km(독곡천, 장산천, 풍암천, 비와천)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :    6,548백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,548	1,200	2,776	2,572
국 비	3,274	600	1,388	1,286
시 도 비
시군구비	3,274	600	1,388	1,286
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

❍ 독곡,풍암소하천 공사착공 및 보상협의            : 2017. 01.

❍ 장산소하천 정비사업 외 2개소 추진 중            : 2017. 03.

❍ 비와소하천 정비사업 실시설계용역 발주           : 2017. 06.

❍ 장산,독곡소하천 정비사업 2개소 사업완료          : 2017. 12.

□ 향후계획

❍ 장산소하천 정비사업 잔여구간 실시설계용역 발주  : 2018. 04.

❍ 비와소하천 정비사업 공사 착공                   : 2018. 05.

❍ 장산,독곡,풍암소하천 도계약심사 및 일상감사 추진   : 2018. 07

❍ 장산,독곡,풍암소하천 실시설계용역 준공             : 2018. 07

❍ 장산,독곡,풍암소하천 정비사업 공사발주             : 2018. 08

❍ 장산소하천 외 3개소 소하천정비사업 추진    : 2018. 08 ~ 2019. 06

사업명

담양  대나무축제

담당자

관광레저과 이현우

(☎380-3152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대나무 이용가치, 담양 이미지 제고와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5. 2. ~ 5. 7.

○ 위 치 : 담양읍 죽녹원 및 관방제림 일원

○ 주최/주관 : 담양군/(사)담양대나무축제위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 720백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	720		720
국 비	220		220
시 도 비
시군구비	500		500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○대나무 관련 각종 체험, 공연, 시설 등

□ 향후계획

○ 2018년 제20회 담양대나무축제 개최

사업명

2017 담양산타축제

담당자

관광레저과 이현우

(☎380-3152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 봄(벚꽃축제), 여름(대나무축제), 가을(가로수음악회)에 이어 관광 비수기       새로운 겨울축제 브랜드화를 통한 사계절 관광객 유치 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. 15. ~ 12. 31.

○ 위 치 : 담양읍 원도심 및 메타프로방스 일원

○ 주최/주관 : 담양군/담양산타축제추진위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	200		200
국 비
시 도 비
시군구비	200		200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 크리스마스 거리조성(경과조명, 포토존)

○ 버스킹 공연 및 크리스마스 관련 이벤트

○ 크리스마스마켓 판매부스 운영 등

□ 향후계획

○ 2018년 제2회 담양산타축제 개최

10-2. 지방채 발행사업

우리 담양군에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 담양군에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	담양군 하수관거정비 임대형민자사업	담양하수관거(주)	60,224	22,033	2,837	35,384	20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

담양군 하수관거정비 BTL민간투자사업

담당자

상하수도사업소 이상수

(☎380-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○기존 합류식 노후 불량관거 개량 및 관거 신설로 하수관거 기능강화

○관거정비를 통한 침입수, 유입수 저감으로 하수처리시설의 운영효율

개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2006. 6.26 ~ 2009.11.25

○ 위    치 : 담양군 담양읍 지침리, 담주리, 객사리, 향교리, 양각리,

남산리, 반룡리, 강쟁리

○ 민간사업자 : 담양하수관거(주)

○ 총사업비 : 60,224백만원 (설비투자비상환 50,696 운영비 9,528)

○ 사업규모 : 오수관거 26.4km  우수관거 12.6km  배수설비 1,422가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	60,224	22,003	2,837	2,842	32,542
국 비	35,487	13,188	1,657	1,657	18,985
시 도 비
시군구비	24,737	8,815	1,180	1,185	13,557
기 타

□ 추진단계

○ 시설운영 중 : ‘09.11.~ ’29. 11 (20년)

□ 향후계획

○설비투자비 분기별 원리금 상환 및 민간위탁 운영비 지급