특수공시자료 목록

연번	실과소	사 업 명	사업기간	총사업비 (백만원)
계		10건		87,845
1	지역경제과	담양시장 시설현대화	2009~2010	1,858
2	친환경농산 유통과	전남딸기 신산업 클러스터육성	2009~2011	6,931
3	관광레저과	죽향문화체험마을 조성	2002~2012	19,700
4	〃	영산강시원 용소주변 정비	2008~2012	5,100
5	문화체육과	관방제림 보존관리	1996~2015	21,800
6	도시디자인과	농촌주거환경 개선	2005~2011	10,237
7	건설방재과	군도 1․4호선 확포장	2009~2011	8,000
8	건설방재과	증암천 생태하천정비 사업	2009~2011	7,000
9	녹지과	산촌생태마을 조성	2010~2012	1,523
10	상하수도 사업소	농촌생활용수 개발사업	2005~2014	5,696

1	담양시장 시설현대화

□ 관내 최고의 관광지인 죽녹원, 관방제림, 국수의 거리와 인접한      담양시장의 환경을 개선하여 관광형 테마시장으로의 변화시켜       시장 활성화 기여

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 담양읍 담주리 5-2번지 일원

o 사업규모 : 장옥내부리모델링, 점포조성, 기존식당등 오수관 신설 등

o 사업기간 : ‘09년 ~ ’10년(2년간)

o 총사업비 : 1,858백만원(국비 1,300, 군비 558)

ꏚ 추진현황

o 2009.  2 : 기본 및 실시설계

o 2009.  4 : 사업설명회 및 간담회

o 2009.  7 : 시설공사 계약(270백만원) - 한국기술개발(주)

o 2010.  3 : 변경계약체결(계약금액 조정 35백만원 증)

o 2010.  3 : 감정평가 실시(토지 3필지, 건물 4개소, 영업보상 5개소)

o 2010.  5 : 공사중지(토지보상 협의 어려움 - 사업계획 변경)

ꏚ 앞으로 추진계획

o 2010.  8 : 사업예정지 변경(안) 검토

o 2010.  9 : 편입부지 토지․건물, 영업보상 실시

o 2010.  8 ~ 9 : 진입도로 확보 (협의매수 등)외 사업 기본계획 수립

o 2010. 10 ~ 12 : 담양시장 시설현대화사업 추진 및 완료

2	전남딸기 신산업 클러스터 육성

□ 딸기 생산자조직의 통합을 통하여 전남딸기 브랜드를 광역화하고

국제 수준의 품질관리 및 유통시스템을 구축하여 전남딸기산업을

1․2․3차 산업이 복합된 새로운 성장산업으로 육성하기 위함

ꏚ 사업개요

o 사업기간 : 2009 ～ 2011 (3년간)

o 총사업비 : 6,931백만원 ( 국비:3,150, 도비:3,150 자담:631 )

o 시행주체 : 농업회사법인 전남딸기 주식회사 (클러스터사업단)

o 사업참여대상 : 전남지역 딸기 생산자 (담양․장성)

ꏚ 추진현황

o 2009. 12 : 클러스터사업단 농업회사법인 설립 및 사업자 등록

o 참여농가수 및 재배면적 확보

- 참여농가수 : 364농가 (담양 270, 장성 94)

- 재배면적 : 122.3ha (담양 84.2, 장성 38.1)

o 식품가공회사 참여업체 확보 : 6개 업체

- 자연과사람들(주), 강동오케익(주), 안복자한과, 담양한과, 고려전통식품

o 전문 CEO 영입 : 1명

o 전남딸기 브랜드 네이밍 선정 : 원스베리, 탐스베리

o 농수산홈쇼핑 등 유통업체 판매실적 : 2억원

ꏚ 앞으로 추진계획

o 혁신체계 구축 및 네트워킹 (542백만원)

- 클러스터사업단 운영, 농업인 전문교육 및 현장기술지도

o 산업화 및 마케팅 (1,678백만원)

- 전문 육묘시설 및 친환경가공시설,공동브랜드 개발

- 공동브랜드 및 연구개발

3	죽향문화체험마을 조성

□ 정자, 한옥, 소리전수관등 우리지역 다양한 문화․역사 자원을

집중 배치 및 전통을 보호하고 관광자원으로 활용하여 죽녹원과

연계한 우리지역 대표 관광지로 조성

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 담양읍 운교리 산106번지 일원

o 사업기간 : 2002. ～ 2012년

o 규    모 : 98,750㎡(29,872평)

o 사 업 비 : 19,700백만원(국비 8,200, 도비 100, 군비 11,400)

o 사업내용 : 우송당(소리전수관), 정자, 시비공원, 잔디광장,

산책로, 자연학습원, 한옥체험장 건립등

ꏚ 추진현황

o 지방재정투융자심사(전라남도)   : ‘02. 10.

o 기본 및 실시설계용역 착수     : ‘03. 12.

o 건축공사완료(4,875백만원)    : ‘06. 10. 4.

- 기반시설, 우송당(소리전수관), 정자, 시비공원, 잔디광장, 포장공사 등

o 전기공사 완료(137백만원)        : ’06. 10. 4.

- 가로등5본, 잔디등39본, 지중등8본, 보행등11, 목교등17

o 한옥체험장 3동 건립          : ’08. 7. 12.

o 죽향문화체험마을 기반시설정비공사  : 2008. 9. 8. ~ 2009. 4. 3. (354백만원)

※ 토지매입 : 49필지 98,750㎡중 37필지 49,142㎡매입(50%)

ꏚ 앞으로 추진계획

o 죽향문화체험마을 지방상수도 개설 : 2010. 6 ~ 11

o 한옥체험장 3동과 관리동 증축 : 2009. 11 ~ 2010. 11

o 죽향문화체험마을 광장 및 주차장 조성 : 2010. 1 ~ 12.

4	영산강시원 용소주변 정비

□ 영산강 시원인 용소를 정비하여 천혜의 자연경관을 보존하고

기와가마터 및 빨치산 유적을 정비하여 관광자원 활용

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 용면 용연리 일원

o 규    모 : 80,527㎡

o 사 업 비 : 5,100백만원(국비 3,060,  군비 2,040)

o 사업기간 : 2008 ~ 2012(5개년)

o 사업내용 : 기반시설, 휴양문화시설, 기와가마터정비, 전적지정비,

생태자연학습장 등

ꏚ 추진현황

o ‘05. 12. 30. : 영산강고대문화권 특정지역지정 및 개발계획고시

o ‘06. 12. 28. : 영산강시원 용소주변정비 및 활용 기본계획 수립

o ‘08. ~ ’09. 12. : 년도별 투자사업비 1,233백만원 시설공사 추진

- 사업내용 : 기와가마터, 하천 및 등산로정비, 구 관리사무소 철거 등

o ‘10.  2. 26. : 2010년 영산강시원 용소주변정비사업 실시설계용역 추진

- 사업내용 : 수목원조성, 등산로 개설 및 정비 등(830백만원)

ꏚ 앞으로 추진계획

o 1단계 공사 지속 추진(‘12년까지)

- 수목원 및 야영장 정비 : 차도철거, 수목원 조성, 자연광장 조성

- 빨치산 흔적지 정비 : 등산로 정비, 흔적지 복원

o 2단계 공사 준비 및 시행(‘12~15)

- 입구지역 정비 : 시원광장, 하수처리장, 주차장, 오토캠핑장

기타 부대시설 등

- 중심지역 : 토산물 판매점, 시원공원, 산악교육 훈련장 등

5	관방제림 보존관리

□ 영산강 주변 식물경관 및 식생환경 개선으로 4대강 핵심사업 수행

□ 죽녹원, 메타세쿼이아 가로수길과 연계한 녹색관광자원 개발

ꏚ 사업개요

o 문화재명 : 담양 관방제림(官防堤林, 천기 제366호, ‘91.11.27.)

o 소 재 지 : 담양읍 객사리, 남산리 일원(123,173㎡)

o 사업기간 : 1996. ~ 2015.

o 사 업 비 : 21,800백만원(국비 15,260 지방비 6,540)

o 사업내용 : 수목보호사업, 토지매입, 제방보수, 마을숲 확대 등

ꏚ 추진현황

o『담양 관방제림의 보존 및 활용 기본계획』 수립 및 승인 : ’06. 12.

o 외과수술, 병충해방제 등 수목보호사업 : ’96 이후 매년 실시

※ 토지매입 : 대상 75,077㎡/199필지, 실적 40,545㎡/102필지

o 관방제림 제방 보강 및 편의시설 확충 : ’07 ~ ’08.

o 2010년 관방제림 보호사업 : 1,150백만원

- 토지매입 : 5,627㎡/8필지, 858백만원(지장물철거 9월한 완료)

- 수목보호사업 및 노거수 유지관리 : 50백만원(공정 70%)

ꏚ 앞으로 추진계획

o 수목보호사업(복토제거, 병충해방제 등) : 지속추진

o 토지매입 실시 : 34,532㎡/97필지(소요예상액 8,500백만원)

o 마을숲 확대(문화 및 편의시설) 조성 : 2012. ~ 2015.

6	농촌주거환경개선

□ 기존 주택 밀집 지역내 도로․상하수도 등 도시기반 시설 정비,

확충으로 주거환경 개선

□ 시가지의 토지이용 증대 및 주거기능 회복으로 주민생활 불편해소

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 담양읍 객사․양각리 일원

o 규    모 : 74,950㎡(객사 40,380㎡, 양각 34,570㎡)

o 사 업 비 : 10,237백만원(국비 5,119 도비 491 군비 4,627)

- 2010년 예산 : 1,646백만원(국비 823, 도비 82, 군비 741)

o 사업기간 : 2005년 ∼ 2011년

o 사업내용 : 도로, 상하수도, 가로등, 주차장, 소공원 등 조성

ꏚ 추진현황

o 사업시행인가 : ‘07. 7. 31

o 토지 및 지장물 보상완료 : 191필지, 5,246백만원

※ 토지수용 공탁 : 18필지, 188백만원

o 공사착공(총괄) : ‘09. 5.18 ∼ 12. 1.18

- 도급액 : 2,624백만원(도급1,649, 관급685, 폐석면14, 일반폐기물276)

- 1차계약분 : 790백만원(도급596, 관급128, 폐석면14, 일반폐기물 52)

- 2차계약분 : 1,340백만원(도급840, 관급315,    -    , 일반폐기물185)

․ 추진내용 : 지장물철거 : 123동/124동중(건물 53/53, 부속사 70/71)

ꏚ 앞으로 추진계획

o 기반시설공사 추진 : ’09. 5.18 ∼ ‘11. 3.23

o 가로등 및 소공원 공사  : ‘11. 12. 31

o 공사준공  : ‘12. 1. 18

7	군도 1․4호선 확포장

□ 교통난 해소 및 산업기반시설 확충을 위한 도로정비 지속 추진

□ 상위도로와 연결 물류비용 절감으로 주민소득 증대 기여

⇒ 사업기간 : 2009 ～ 2011(3년간)

ꏚ 사업개요

【군도 1호선】

o 위    치 : 담양군 창평면 유천리 ～ 외동리

o 사 업 량 : L=3.80㎞, B=8.0m

o 총사업비 : 4,500백만원(군비)

【군도 4호선】

o 위    치 : 담양군 봉산면 유산리 ～ 장산리 ～ 금산리

o 사 업 량 : L=3.2㎞, B=8.0m

o 총사업비 : 3,500백만원(군비)

ꏚ 추진현황

o 군도정비사업 보통교부세 교부결정  : 2009. 7

o 지방재정 투융자 심사  : 2009. 11

o 실시설계용역 발주 및 착공  : 2009. 11

o 실시설계 노선선정을 위한 주민설명회 개최  : 2010. 1

o 사전환경성 및 재해영향성 검토등 관련법 협의 : 2010. 3 ~ 7

o 실시설계용역완료 및 공사발주․착공 :  2010. 5 ~ 6

ꏚ 앞으로 추진계획

o 편입토지 감정평가 및 보상금 확정․협의  :  2010. 7 ~ 2011. 12

o 토공작업 및 구조물 시공  :  2010. 7 ~2011. 12

o 보조기층 포설 및 포장 시공 : 2011. 12 ~ 2012. 5

8	증암천 생태하천정비 사업

□ 하천의 획일적 콘크리트 고수부지 및 호안으로 생태기능 미흡

하고 이․치수 기능강화 등 생태하천정비로 친수공간조성 확보를      통한 지역주민의 활용도 제고와 환경개선 및 생태계보전

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 고서면 동운리 1002-3번지외 153필지

o 사업개요 :  L=2.5km(생태하천)

o 사업기간 : 2009 ~ 2011(3년간)

o 총사업비 : 7,000백만원(국비4,200,   군비 2,800)

ꏚ 추진현황

o 사업지구확정 :   2009.   5. 20

o 추경예산확보 :   2009.  9(100백만원)

o 실시설계용역계획 수립 (장산엔지니어링)

- 용역기간 : 2009. 11. 20 ~ 2010. 9. 23(172백만원)

o 문화재지표조사용역추진 ((재)전남문화재연구원)

- 용역기간 :  2009. 12. 3  ~ 2010. 3. 7

o 주민설명회 개최 :  2010. 3

ꏚ 앞으로 추진계획

o 사업계획(안)확정 : 2010. 9

o 익산청 및 전라남도 심의 : 2010. 10

o 사 업 발 주 : 2010. 10

9	산촌생태마을 조성

□ 낙후된 산촌지역 생활환경개선과 소득기반조성을 통한 삶의 질

향상과 지역균형 발전 도모

□ 산촌 생활환경 정비 및 어메니티 자원 육성으로 새로운 관광자원

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 대덕면 운산리 저심마을

o 사업규모 : 산촌유학교육센터, 슬로우푸드체험장, 산림소득자원육성 등

o 사업기간 : 2010～2012년

o 총사업비 : 1,523백만원(국비 1,066, 도 137, 군 320)

ꏚ 추진현황

o 산림청 대상사업 선정 : 2009. 4. 10.

o 도 기본계획수립 보조금 교부결정 : 2010. 2.26

o 기본계획 수립 용역 의뢰 : 2010. 3. 9

o 용역업체인 산림조합중앙회 계약 체결 : 2010. 4. 28

o 용역업체 주민설명회 개최 : 2010. 5. 19

o 기본계획 수립            : 2010. 6. 30

o 사전재해 영향성 검토     : 2010. 6. 30

ꏚ 앞으로 추진계획

o 기본계획 및 사전설계 수립 승인 : 2010. 10월한

o 추진협의체 및 지역주민 교육 : 2010. 11월한

o 세부사업계획 단계별 시행

- 1차년도 : 산촌생태마을 기본계획 및 실시설계

- 2․3차년도 : 기본계획 수립 후 연차별 시행

10	농촌생활용수 개발사업

□ 농어촌 자연마을은 인구가 적고 분산되어 광역․지방상수도

공급이 어려운 실정으로 기존의 우물․샘․간이상수도 등은

수질이 점차 악화되어 있어 이에 대한 대안으로 심층지하수를

개발하여 용수문제 해결

ꏚ 사업개요

o 위    치 : 담양군 일원

o 사업규모 : 관로(L=43.4km)  관정개발(26공)  전기시설(1식)

o 사업기간 : 2005 ~ 2014(10년간)

o 총사업비 : 5,696백만원(국비3,984,  군1,712)

ꏚ 추진현황

o 시설공사(2005년~2009년)

- 사 업 량 : 17개소 (관로 25km, 관정 17공, 전기시설 1식)

- 사 업 비 : 2,556백만원

o 시설공사(2010년)

- 사 업 량 : 2개소 (관로 3.2km, 관정 2공, 전기시설 1식)

- 사 업 비 : 388백만원

ꏚ 앞으로 추진계획

o 시설공사(2010년)

- 사 업 량 : 1개소 (관로 1.9km, 관정 1공, 전기시설 1식)

- 사 업 비 : 189백만원

- 이용시설 및 전기공사 추진  : 2010. 7월말

o 시설공사(2011~2014)

- 사 업 량 : 8개소 (관로 15.7km, 관정 8공, 전기시설 1식)

- 계약금액 : 2,480백만원